문서번호	원무과-14586
결재일자	2016.10.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	서무팀장	원무과장
이금재	김지광	10/19 이동문
협 조

병원청사 노후(누수)난방배관 정비 계획(수정)

2016. 10.

서울특별시 은평병원

(원무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

병원청사  노후(누수)난방배관 정비 계획(수정)

우리청사 난방배관의 노후화로 인하여 누수 등이 지속적으로 발생하고 있어, 노후화된 배관 교체 등 시설을 정비함으로 시설유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추 진 배 경

동절기 병원청사 난방가동 대비하여 노후화로 누수 등이 지속적       으로 발생하고 있는 난방 배관(공급관 및 가지관)에 대한 정비        필요.

Ⅱ		공사개요

공 사 명 : 병원청사 노후(누수)난방배관 정비공사

공사내역 : 난방배관 교체 및 부속공사

▸ 지상 2층 진단방사실, 정신과외래 복도 등 (14m)

▸ 지상 3층 32병동, 31병동 (28m)

▸ 지상 4층 42병동, 41병동 (22m)

▸ 지상 5층 의사실 (5m)

공사기간 : 착공일부터 15일

- 1일 ~ 4일 : 공사계약 및 착수

- 5일 ~ 10일 : 난방 배관 철거 및 설치작업

- 11일 : 수압시험

- 12일 ~ 13일 : 보온작업

- 14일 ~ 15일 : 환경정리 및 장비철수

Ⅲ		수 정 내 용

계약업체 변경 :

(당초) (주) 부성엔지니어링 ⇒ (변경) (주)이너지테크놀러지스

변경사유 :

- 건설산업기본법 시행령 8조 전문공사를 시공하는 업종(난방공사)

자격요건 미해당으로 인해 변경

Ⅳ		업체선정 및 소요예산

계약방법 : 수의계약

- 근  거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령

제25조 제1항 제5호

계약업체 : (주)이너지테크놀러지스 대표 ***

▸ 주    소 : *********************

▸ 연 락 처 : ************************************

총공사비 : 5,720,000원

- 산출근거 : 붙임. 산출기초조사서 참조

예산과목 : 은평병원 운영, 은평병원 청사시설 운영관리, 일반운영비,

공공운영비

Ⅲ		기타사항

공사에 따른 불편사항 안내 협조 공문 발송 : 각부서

공사에 따른 소음,먼지 등 최소화 및 공사근로자 안전대책

(휀스, 안전띠) 확보

붙임 : 1.산출기초조사서 1부.

2.설계내역서 1부.

3.견적서 각1부.

4.누수배관 도면 1부.