투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	방재시설부장
(경유)
제 목	탄천물재생센터 복개공원화공사(4단계) 전면책임감리용역 조정 검토 의견 알림

1. 방재시설부-16259호(2016.10.18.)와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 「탄천물재생센터 복개공원화(4단계) 전면책임감리용역」에 대한 계약금액 조정 검토 요청사항에 대하여 아래와 같이 검토 결과를 알려드리니 조치하여 주시길 바랍니다.

가. 검토결과 요청내용

구분	공정	배 치 기 간		비 고
		검토전	검토후
상주감리원	기계	`17.01.01.~`17.02.28. (2개월)	`17.01.01.~`17.03.31. (3개월)	(증1개월)
	전기	`16.08.29.~`16.11.28. (3개월)	좌 동	(증1개월) 전기공사 준공기한 (`14.04.30)까지 배치하여 인수인계 완료 필요
		`17.03.01.~`17.03.31. (2개월)	`17.03.01.~`17.04.30. (3개월)

끝.

	설비부장
주무관	김두환		열빛총괄과장	유병기		설비부장	10/19 권오식
협조자	주무관	추한영
시행	설비부-16170	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8(무교동 96) 프리미어 플레이스 빌딩 15F 도시기반시설본부 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8611	/전송	02-3708-8659	/	buckgolje@seoul.go.kr	/	부분공개(5)