문서번호	설비부-16180
결재일자	2016.10.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
신정규		代윤석훈	전결 10/19 권오식
협조

『도심권 50+캠퍼스 및 복지타운조성  통신공사』

실정보고 사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『도심권 50+캠퍼스 및 복지타운조성  통신공사』

실정보고 사항 검토보고

도심권 50+캠퍼스 및 복지타운조성 통신공사의 주관부서 요청과 관련하여 건설사업관리기술자 실정보고가 있어 이에 대한 검토 보고임.

공사개요

□ 건    명 : 도심권 50+캠퍼스 및 복지타운조성 통신공사

□ 규    모 : 지상10층/지하2층(연면적 10,830㎡)

□ 계약현황

(단위:천원)

구 분	계 약 자	공사기간	계약금액	비 고
통신공사	㈜엘리시스	‘15.12.21.~ ‘16.11.14	770,759	총 차
관급자재 (방송장비 추가구매)	아이엠피	‘16.09.26.~ ‘16.11.14.	223,500
관급자재 (네트워크 설비)	나이츠넷	‘15.11.12.~ ‘16.11.14	26,400

관련근거

□ 건설사업관리자 실정보고 건[PC도통 16-198호, 2016. 10. 11.]

실정보고 내용

□ 3층 전산실과 영상/미디어실 통합에 따른 배관·배선공사 물량 변경

□ 지하1층~지상10층 수평 케이블트레이 규격 변경(사다리형->펀치형)

□ 실 통합에 따른 네트워크장비 및 방송장비 물량 변경(주관부서 요청)

통신공사 변경내용

구 분	공 사 비(천원)			사 유	비 고
	당 초	변 경	증·감
통신공사	495,233	507,938	증)12,704	실 통합에 따른 배관배선 물량 변경 등	직접 공사비

관급자재(방송장비 및 네트워크 장비) 변경내용

구 분	계약금액(천원)			계약자	사 유
	당 초	변 경	증·감
방송장비 추가구매 (12162204700)	223,500	226,505	증)3,005	아이엠피	실 통합에 따른 전동스크린 규격 및 프로젝터 밝기 상향
네트워크 장비 (00156144900)	26,400	27,500	증)1,100	나이츠넷	실 통합에 따른 네트워크 장비 물량 증가

건설사업관리기술자 의견

□ 주관부서 요청 및 건축평면 변경에 따른 통신 시공물량을 변경하고 관급자재인 방송장비와 네트워크장비에 대하여 계약변경함이 타당함.

보고자 의견

□ 건설사업관리기술자 검토의견이 타당하여 승인하고자 하며, 공사비 변경은 설계변경 시 반영하고 방송장비 추가분과 네트워크장비는 실정보고 내용에 따라 변경계약 하고자 함.

행정사항

□ 관급자재(전관방송 및 A/V설비 추가구매) 변경계약 요청(건설총괄부)

□ 관급자재(네트워크 장비) 변경계약 요청(건설총괄부)

붙임  실정보고서(건설사업관리기술자) 1부.  끝.