함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	변경계약 의뢰(준공기한 연기:창천동 502-**번지 주변외 6개소 배급수관 정비공사)

우리사업소에서 시행중인『창천동 502-10번지 주변외 6개소 배급수관 정비공사』에 대하여 준공기한을 별첨과 같이 연기결정하고 그 결과에 따라 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공사명 : 창천동 502-10번지 주변외 6개소 배급수관 정비공사

나. 계약자 : ㈜정인프라임 대표 박정숙

다. 계약금액 : 금469,058,110원(변경없음)

라. 계약기간

1) 당초 : 2016.04.25. ~ 2016.10.21.

2) 변경 : 2016.04.25. ~ 2016.11.04.

마. 연기사유 : 도로점용 허가지연으로 절대공기 부족

바. 지체상금 부과여부 : 미부과

사. 선금지급여부 : 미지급

따로붙임 : 1) 준공기한 연기결정 품의서 1부.

2) 합의서 1부. 끝.

	서부수도사업소장
주무관	양재덕		급수설비팀장	김찬모		급수운영과장	10/19 박길영
협조자
시행	급수운영과-25462	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02)3146-3644	/전송	02)3146-3689	/	yangjd218@seoul.go.kr	/	대시민공개