문서번호	시설보수과-1373
결재일자	2014.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
류춘광		김권일	02/26 이규상
협조

해빙기대비 도로시설물 안전점검 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 2.

강서도로사업소

(시설보수과)

해빙기대비 도로시설물 안전점검 시행계획

취약시기 안전사고 예방을 위하여 우리사업소 관리 일반시도 상의 도로시설물에 대하여 외부전문가 합동으로 2014년 해빙기대비 안전점검 시행계획을 수립 시행하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		현 황

관련근거

도로시설과-3236호(2014.2.26) : 해빙기대비 도로시설물 안전점검 시행

대상 시설물 (시설보수과 57개 시설물)

구 분	계	일 반 교 량	고 가 차 도	입 체 교차로	복 개 구조물	터 널	지 하 차 도	비 고
계	57	18	9	4	4	5	17
1 종	12	3	3		1	4	1
2 종	19	7	3	1		1	7
법 외	26	8	3	3	3		9

Ⅱ		점검 계획

추진기간 : 2014. 2.26(수) ~ 3.31(월)

점검 : ‘14. 2.26(수)~3.17(월) 20일간 // 조치 : ‘14. 3.18(수)~3.31(월) 14일간

점검방법

점검조는 2인이상 1조로 시설물별 담당자와 시설안전자문단 합동점검

※ 도로시설과 안전점검반과 합동 점검대상시설물

- 양화교(김태흥), 신정교(이주호) ⇒ 김종호(시설기획팀장), 엄기영, 안대호

- 개봉고가 · 가리봉철도고가(서외택) ⇒ 민형일, 김훈겸, 김은진

시설물 부재별 점검사항(붙임-3)에 의거 점검 시행

점검조 편성

성 명	담 당 시 설 물
1조 류춘광 조정갑 이승행 천석기 21개소 (12+6+2+1)	- 양화교(김태흥), 오목교서측지하차도, 오목지하차도, 염창IC하부복개 - 오류고가(노경찬), 개화천복개, 개화교, 개화IC - 개봉고가·가리봉철도고가·여의2교(서외택), 시흥IC - 궁동터널(박정용), 고척교, 오금지하차도, 구로지하차도 - 생태터널(성경익), 광명교, 개봉교, 역곡천교, 범박터널
2조 천석기 전재형 23개소 (11+12)	- 양평교(김인석), 행주1교, 행주2교, 개화지하차도, 공항입구지하차도 - 선유고가(민대흥), 화곡고가, 신월IC, 목동교, 목동교서측지하차도 - 작동터널(강병윤), 국회앞지하차도, 등촌지하차도, 영등포R IC - 광명고가(박용걸), 구로1교, 가마산고가, 가마산지하차도 - 외발산지하차도(박훈규), 화곡터널, 고척2지하차도, 구로고가, 오류철도고가
3조 이승행 조정갑 13개소 (10+3)	- 신정교(이주호), 도림천하류복개, 오목교, 오금교, 신정교접속교 - 도림천복개(좌안-최용기), 구로역지하차도, 신도림지하차도 - 서울교, 구로도림교, 신월지하차도, 서울교접속지하차도, 성산지하차도

※ 주책임자(시설물 담당), 서울교 등은 시설안전자문단 중 1인 선정 합동점검 시행

주요 점검사항

구 분	주요 점검사항
공통사항	- 지반침하, 전도 등 해빙기 동결융해 취약사항 - 기타 위험시설물 적치 및 시민불편사항 등
교량, 고가	- 시설물별 취약부재 이상여부 근접 확인 - 신축이음·교량받침 거동, 교면포장, 바닥판 하부, 배수시설
터널, 지하차도	- 터널 갱구부사면, 옹벽, 천장, 배수시설, 타일탈락 등
복개구조물	- 옹벽, 바닥판하부, 상부포장, 하상 토사적치 및 기초 세굴 등

점검결과 조치계획

점검결과 지적사항 중 경미한 사항은 현장에서 즉시조치 또는 일상유지보수 업체로 하여금 신속히 작업지시 하여 보수

구조물의 안전에 영향을 주는 특이사항 적출시 즉시 보고후 관련분야  전문가(시설안전자문위원 등)의 의견을 포함한 조치계획 수립

Ⅲ		행정사항

점검조별 시설안전자문단과 점검일정 협의 확정

도로시설과 안전점검반 합동점검 대상시설물은 반장과 일정 조율

시설물별 안전점검보고서 작성 (양식2)

점검실적을 3.17(월)까지 도로시설과로 제출 (양식1)

조치결과를 3.31(월)까지 도로시설과로 제출 (양식1,2)

시설안전자문위원 점검수당 지급

점검수당 : 200,000원/회 (13회 시행시 2,600,000원)

예산과목 : (도시개발특별회계, 도로시설과) 도로시설관리, 도로시설물운영, 도로시설물 안전자문단운영, 일반운영비, 사무관리비(100-201-01)

붙임 :  1. 도로시설물 점검결과 총괄(양식1)

2. 도로시설물 안전점검 보고서(양식2)

3. 시설물 부재별 점검사항.   끝.