투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기 요청(염창2 외 1개소 빗물펌프장 기계설비공사)

1. 설비부-2278호(2014.2.26.)와 관련입니다

2. 우리 본부에서 추진하고 있는 『염창2 외 1개소 빗물펌프장 증설 기계설비공사』의 관급자재【배수펌프(1차)】 납품기한을 아래와 같이 연기 요청합니다.

가. 납품기한 연기요청 내용

품 명	계약번호	금 액(원)	계약업체	납 품 기 한		비 고
				당 초	변 경
입축사류펌프(1차)	12132146500	45,452,000	㈜대한중전기 대표 김재훈	`14.2.28	`14.7.30	152일

나. 연기사유 : 선행공정인 토목공사 지연에 따른 관급자재 사용시기 미도래

다. 계약금액 및 수량 : 변경없음

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

따로붙임 : 관급자재 납품기한 연기 검토 보고서 1부. 끝.

	설비부장
주무관	추한영		열빛총괄과장	권오식		설비부장	02/26 박기형
협조자
시행	설비부-2282	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층	/	http://smih.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8605	/전송	02-3708-8659	/	cc2436@seoul.go.kr	/	대시민공개