문서번호	교량보수과-1206
결재일자	2014.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	교량보수과장	강서도로사업소장
김규춘	안완순	전결 02/26 이규상
협 조
	주무관		김승진

2014년도 한강교량 및 자동차전용도로

도로시설물 일상유지보수공사 발주계획

2014. 2

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강서도로사업소

(교량보수과)

2014년도 한강교량 및 자동차전용도로

도로시설물 일상유지보수공사 발주계획

한강교량 및 자동차전용도로상 도로시설물의 효율적 유지관리 및 상시 보수 체계 구축을 위한 일상유지보수공사 발주계획을 보고 드림

Ⅰ		관련근거

예산배정

○ 도로시설과-1699(2014.2.3) --- 예산배정 800백만원 (한강교량팀)

○ 도로시설과-2493(2014.2.14) --- 예산배정 525백만원 (자동차전용도로팀)

Ⅱ		사업개요

총 괄 : 2건/1,325백만원

공사명	한강교량 일상 유지보수공사	자동차전용도로 일상 유지보수공사
위 치	한강교량 3개시설 (성산대교,가양대교,행주대교)	자동차전용도로 도로시설물 (29개 시설)
사업규모 (주요공종)	단면보수 310㎡, 주입보수 30㎡, 표면처리 100㎡, 도장보수 900㎡, 용접보수 30m, 조인트 보수 100m, 교면포장 10a, 차선도색 1,000m, 부대공1식	단면보수 1,300㎡, 주입보수 2,000m, 표면처리 7,900㎡, 도장보수 60㎡, 조인트 보수 100m, 교면포장 100a, 차선도색 120m, 부대공 1식
사업기간	2014.3~2014.2.28	2014.3~2014.2.28
사 업 비	800백만원	525백만원
기타 (폐기물 처리)	전자공개수의계약 ⇒ 업무의 효율적 관리를 위하여 폐기물처리용역은 통합으로 발주(1건)

※ 건설폐기물처리 분리발주 : 건설폐기물의 제활용촉진에관한 법률 제15조 1항

Ⅲ		입찰 및 계약방법

입찰방법 : 일반경쟁입찰

입찰참가 자격

○ 『건설산업기본법시행령』 제7조에 의한 시설물유지관리업 등록 업체

○ 주된 영업소의 소재지가 서울특별시 이외인 업체는 서울특별시 소재 시설물유지관리업 등록업체와 공동도급(공동이행방식)를 체결하여 참가하여야 하며, 서울시 소재업체의 시공참여 비율은 공사 금액의 49% 이상으로 하고,

○ 공동수급업체 대표자는 분담비율이 가장 많은 업체로 하며, 구성원은 대표자를

포함하여 2개업체 이내

Ⅳ		공사감독 수행 계획

2014년 한강교량 일상유지보수공사

○ 용역명 : 한강교량일상유지보수공사 전면책임감리 용역

○ 감리기간 : 2014.3 ~ 2017.2.28(3년간) -- 금회 1차: 2014.3 ~ 2015.2.28

○ 예산액 : 1,510백만원( 금회 1차 485백만원)

※ 발주 및 업무수행 : 도시안전실 도로시설과 한강교량팀

2014년 자동차전용도로 도로시설물 일상유지보수공사

○  공사감독 : 자체감독 시행(교량보수과)

※ 서울특별시 공사 감독업무 위·수탁계약서 제3조(위탁업무의 범위) ---연간단가공사 제외

Ⅴ		작업 우선순위 및 관리감독

작업 우선순위

○ 최근(1~3년내) 실시한 정밀안전진단 및 정밀점검 용역결과에 의한 1순위

(단기)보수물량 우선 시행

○ 정기점검 등 각종 안전점검 시 적출된 보수물량 작업 시행

○ 교통사고 발생 및 민원사항 등으로 접수된 보수물량 작업지시 시행

작업지시 및 현장 관리감독

○  도로시설물 담당 작업지시 관련근거 마련

- 점검보고서 및 보수계획 보고서 작성

○  차수별 작업지시 및 현장 관리감독 시행

○  완료보고서 접수시 시공상태 및 하자여부 확인

※ 공종별 하자담보책임기간은 지방자치단체를당사자로하는 계약에관한 법률

제20조, 동법시행령 제69조, 동법시행규칙 제68조에 의함

작업지시 및 공사진행 흐름도

현장조사

(시설물담당)

관련근거마련

(보고서작성)

작업지시

(공사담당)

공사시행

(시공사)

공사감독

(책임감리 및 공사담당)

작업완료보고서제출

(시공사)

현장확인

(공사감독)

기성및준공

(공사감독)

Ⅵ		향후 추진일정

2014. 02. ∼ 03. 10  : 설계 및 계약심사 의뢰

2014. 03. 10 ∼ 03. 20  : 발주 및 공고

2014. 03. 20 ~ 03. 31  : 계약 및 착공

2014. 04. 01 ~ 2015. 2. 28 : 공사시행

Ⅶ		예산과목

교량관리,한강교량관리,한강교량일상유지보수,시설비및부대비,시설비(800백만원)

도로시설관리, 자동차전용도로교량관리, 자동차전용도로, 도로시설물 일상유

지보수공사,시설비및부대비, 시설비(525백만원)

별첨  1. 주요공종 및 물량 내역 1부.

2. 위치도 및 시설 전경 1부.

3. 시설물별 세부물량 각 1부(따로붙임).  끝.

〔 별첨 #1〕

주요공종 및 물량 내역

1. 공사명 : 2014년 한강교량일상유지보수공사

구분				계	시설물별				비고 (기타)
구분	규격 및 손상내용	단위	적용 물량		성산대교	가양대교	행주대교
							상류교	하류교
교면포장	망상균열,포트홀,소성변형,파손	㎡	701	700.37	700.37
바닥판 하면	망상 균열	㎡	301	301.00	301
	누수, 백태	㎡	45	44.72	44.72
	누수, 부식	㎡	10	10.00	10
	백태	㎡	10	9.50	9.5
	박락,재료분리	㎡	10	9.70	4.6		5.1
	0.3mm이상 균열	m	28	27.84			4.2	23.64
	철근노출	㎡	1	0.78				0.78
	도장박리,부식등	㎡	898	898.89		898.89
아치단부가로보	부식,누수	㎡	82	81.63	81.63
	체수	㎡	13	12.64	12.64
	보강재 손상	ea	18	18.00	18
신축이음	누수	ea	5	5.00	5
	하부누수	m	53	52.20				52.2
	후타재 열화,파손	㎡	53	52.10	52.1
	하부con’c박락및누수	㎡	45	45.00	45
	유간부 체수	m	2	1.50			1.5
	유간부 퇴적	㎡	98	97.30			62.5	34.8
	덮개미설치	ea	1	1.00				1
가로보	볼트체결누락및불량	ea	16	16.00	16
	0.3mm이상 균열	m	112	111.70			111.7
	들뜸, 재료분리, 박리	㎡	58	57.54			57.54
	배선인입구 누수	ea	6	6.00			6
	조류배설물 퇴적	㎡	25	24.94			24.94
	철근노출	㎡	1	0.12			0.12
	도장박리,손상	㎡	11	10.51		10.51
주형내부	도장박리및부식	㎡	354	353.33		353.33
	실링미처리	ea	3	3.00		3
난간 및 연석	균열 0.3mm이상	m	109	109.00		78.2	23.6	7.2
	박리,박락	㎡	161	161.06		53.16	107.9
	콘크리트들틈,파손	㎡	1	0.69			0.69
	부식,박리	㎡	14	13.06		13.06
배수시설	배수구 막힘	ea	1	1.00			1
교량받침	플레이트 부식	ea	9	9.00			9
교대및 교각	0.3mm이상 균열	m	8	7.20			7.2
	파손,균열	㎡	1	0.12			0.12
주탑 및 케이블	볼트부식 재도장	㎡	4	3.46				3.46
	0.3mm이상 균열	m	13	12.24				12.24
정착부	보호캡고무재열화	ea	12	12.00				12
하부구조	철근노출(수중)	㎡	6	5.33				5.33
부대시설	조류방지망 미설치	ea	2	2.00			2

☞ 근거 : ① 2012년, 2013년 정밀점검 및 정밀안전진단 용역 보고서 정비물량 참조

② 2013년 해빙기 등  안전점검시 적출된 미조치 물량 참조

2. 공사명 : 2014년 자동차전용도로 시설물 일상유지보수공사

주요공종		규격 및 손상내용	단위	물량	비고
표면보수		균열(W=0.2㎜), 망상균열, 백태 등	㎡	7,948
주입보수		균열(W=0.3), 연석균열 등	m	2,037
단면보수	t=20㎜	콘크리트 파손, 재료분리, 연석파손 등	㎡	424
	t=30㎜	콘크리트 철근노출	㎡	860
교면포장		재 포장	㎡	7,426
		팻칭보수	㎡	623
		방수	㎡	1,728
신축이음		단차보수	m	28
		덮개 설치	개소	8
		조인트 파손	m	98
도색		차선 재도색	m	120
도장		강거더 부식, 박리	㎡	53
		교량받침 부식, 박리 등	개소	90
배수시설		배수관 파손	m	50
		배수구 청소	㎡	131
기타		난간설치 및 보수	m	21
		실런트 파손	m	81
		점검통로 설치	m	40
		중앙 연석부 파손	㎡	39
		연석부 균열	m	144

☞ 근거 : ① 2012, 2013년 정밀점검 및 자체점검시 1,2순위 정비물량 참조

② 2011 ~ 2013년 해빙기 등  안전점검시 적출된 미조치 물량

〔# 별첨 2〕

위치도 및 시설사진

□ 공사명 : 한강교량일상유지보수공사

성산대교	가양대교	행주대교