기  성  보  고  서

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	서장원	황혁기	전결 02/27 이자원

명에 의하여 ‘13년 강서,양천,구로구 일대 긴급누수복구공사(장기계속) 기성금 신청(7차) 현황을 아래와 같이 보고합니다.

2014.   2.   27

보고자 : 지방 시설 주사   황 혁 기

지방시설주사보   서 장 원

강서수도사업소장 귀하

1. 공사 현황

가. 공 사 명 : 2013년 강서,양천,구로구 일대 긴급누수복구공사(장기계속공사)

나. 착 공 일 : 2013. 5. 13

다. 준공기한 : 2014. 6. 30

라. 도 급 액 : 2,480,874,700원

마. 도 급 자 : 삼융종합건설(주)  대표 : 백준호

2. 기성금 신청현황

가. 위       치 : 강서구 화곡동 1036번지외 248건

나. 금회공사기간 : 2014. 1. 1 ~ 2014. 2. 10(41일간)

다. 기 성 금 액 : 258,720,000원

라. 예산 과목 : 상수도사업비,영업비용,배급수비,기타교체비-상수도관 누수복구

3. 기성 내역

가. 기성내역                                                          (단위: 원)

구 분	계 약 금 액	전회까지 기성금액	금회 기성금액	기성 합계	잔 액
도 급 액	2,480,874,700	1,500,653,000 (60.49%)	258,720,000 (10.42%)	1,759,373,000 (70.91%)	721,501,700 (29.09%)

나. 누수복구개요

(단위:개소)

계	급수관	송･배수관	비 고(기타)
249	167	21	61

다. 세부내역

연번	구 경	공사개요(m)	급수관 연락공사(개소)	비 고
계	D=15~50mm	300	91
1	D=15mm	59	40
2	D=20mm	107	29
3	D=25mm	78	10
4	D=30mm	16	2
5	D=40mm	19	8
6	D=50mm	21	2

4. 처리 의견

○ 상기와 같이 2014년 긴급누수복구 기성(7차)을 시행코자 합니다.

따로붙임 : 1) 기성내역서 1부.

2) 누수복구대장 1부.  끝.