투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	설계변경(총차,2차)계약 의뢰(서울창업허브조성 기계설비공사)

우리 본부에서 시행 중인「서울창업허브조성 기계설비공사」에 대하여

아래와 같이 계약변경 의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울창업허브조성 기계설비공사

나. 계 약 자 : 대진공무(주) 대표자 박종옥

다. 계약변경 내역                                     (단위:원)

구 분	계 약 금 액			공사기간
	당 초	변 경	증 감
총 차(3회)	5,146,121,200	5,108,477,000	감)37,644,200	‘16.1.29~‘17.4.28
1 차(준공)	300,000,000	300,000,000	준 공	‘16.1.29~‘16.9.30
2 차 (3회)	4,846,121,200	4,808,477,000	감)37,644,200	‘16.4.8 ~‘17.4.28

라. 예산과목 : 디지털창업과,일자리 연계강화를 통한 서민경제 활력제고, 체계적

창업시스템 구축,서울창업허브조성,시설비및부대비,시설비

따로붙임 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서(총차3회,2차3회) 각 1부

3. 공사원가 제비율검증서 1부

4. 합의서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	윤석훈		녹색성장과장	김창균		설비부장	04/25 권오식
협조자	경리과장	代김용범
시행	설비부-6909	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어 플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8637	/전송	02)3708-8659	/	sky8649@seoul.go.kr	/	부분공개(5)