문서번호	정수시설과-1593
결재일자	2017.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김종원		김긍채	05/02 임철수
협 조
	주무관			함인석

『인조잔디구장 조성공사』

감독 수행 보고(2차)

2017.  4.

『인조잔디구장 조성공사』

감독 수행 보고(2차)

인조잔디구장 조성공사 감독업무 수행중 발생한 보도블럭 재포장, 인조    잔디구장 주변 구배 조정 등에 대한 실정을 보고 드림

□ 공사개요

○ 공사명 : 인조잔디구장 조성공사

○ 공사비 : 230,555천원

- 계약금액 225,905천원, 관급비 4,650천원

□ 현장실정 및 검토보고

○ 인조잔디구장 서측 파고라 앞 보도블록

- 현 황 : 잔디구장 신설 배수로 단면과 기존 보도브럭층과의 단차발생

- 검 토 : 신설 배수로 단면과 기존 보도블럭층와의 단차 및 일부 보도블록 침하로 인한 재포장(5m×20m)

기존 보도블록 현장사진	단면도
(5m×20m) (측구)

보도블럭

○ 인조잔디구장 북측 외곽 녹지대 구배 조정

- 현 황 : 당초 구장(98×64m)을 국제규격으로 확장(100×64m) 으

인해 북측녹지대의 급경사로 토사유출 우려가 있음

- 검 토 : 토사의 유실이 없도록 토사구배를 완만하게 하기 위한 절토가 필요하며, 절토시 지장이 되는 은행나무(2개)를 뒤편으로 이식 하고자 함.

현장사진	단면도
	NO1
	NO2

□ 설계변경 금회 예상금액 : (증)2.700천원

- 총 증액 예상금액 16,000천원 (금회 2,700, 1차보고 13,300)

1. 보도블록 재포장 : 700천원

2. 녹지대 급경사지 절토 및 잔토처리 : 2,000천원

□ 보고자 의견

○ 검토결과을 반영하여 선시공 하고, 향후 설계변경하여 정산코자 함

(신규공종 단가는 설계금액×낙착율 적용한 단가로 협의코자 함)