문서번호	도시철도토목부-5920
결재일자	2017.5.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
장대성		최진규	05/10 김진팔
협 조
	주무관			정중규

『서울 지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사』

9차공사 예비준공검사 결과 보고

2017. 5.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『서울 지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사』

9차공사 예비준공검사 결과 보고

「서울 지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사」9차공사에 대하여 계약 기한내 준공 가능여부 및 미진사항에 대한 사전 보완을 위해 예비 준공검사를 실시하고 그 결과에 대해 보고 드림.

□ 공사개요

○ 사 업 명 : 서울 지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

○ 사업규모 : 총 연장 1,560m

- 본선개착 96M, 본선터널 1,134M, 정거장 2개소 330M

○ 사업기간 : ‘09.12.31 ~ ‘18.12.31

○ 사 업 비 : 209,159백만원

○ 계 약 자 : 삼성물산(주) 외 2개사

○ 감 리 사 : ㈜수성엔지니어링 외 3개사

□ 예비준공검사 현황

○ 일    시 : ‘17.04.28.(금) 15:00~

○ 장    소 : 919공구 회의실 및 현장

○ 예비준공검사자

- 본  부 : 도시철도토목부 김근수 주무관 외 3인

○ 예비준공검사 입회자

- 본  부 : 공사관리관 정중규 주무관 외 1인

- 감 리 사

· 기술지원건설사업기술자 위광용 외 4인

· 책임감리원 : 김완수

- 도 급 사

· 현장대리인 : 이현구

□ 9차공사 추진현황

○ 공사기간 : ‘16.06.23 ~ ‘17.05.31

○ 계약금액 : 금12,720백만원

○ 공 정 율 : 86.5%

○ 9차공사 추진현황

(단위 : 백만원)

구 분	계 약 금 액	실 적 금 액	잔 액	비 고
금 액	12,720	11,000	1,720

○ 9차공사 시공 및 미시공 현황

위 치		공 종	단위	계약	시공	잔여량	비 고
토목 분야	931S2E2 환기구	구조물공	m3	66	44	22	환기덕트
	932 정거장	구조물공	m3	381	221	160	출입구 구조물 환기덕트, 피난계단
		지장물 복구공	식	1	1	-	하수박스,154KV등
	932S1E1 환기구	구조물공	m3	78	48	30	환기덕트
	933 정거장	토공	m3	2,873	2,873	-	932S2E2환기구 토공굴착 (우리은행 앞)
		버팀설치	본	55	55	-
	쉴드 터널	쉴드TBM 굴진 및 세그먼트조립	m	256.5	256.5	-	터널 1구간 상선
		인버트타설	m	1,128	1,128	-	터널2구간하선 터널1구간하선
기계 분야	932 정거장	장비설치공사	대	52.8	24.6	28.2	기계실 장비설치
		공조닥트설치공사	m2	5,144	5,144	-	정거장 배관공사
		소화배관공사	m	212	212	-	정거장 배관공사
		지열시스템	식	1	1	-
	933 정거장	장비설치공사	대	58.40	28.40	30.00	기계실 장비설치
		공조닥트설치공사	m2	6,966	6,966	-	정거장 배관공사
		소화배관공사	m	528	258	-	정거장 배관공사
		지열시스템	식	1	1	-
건축 분야	932 정거장	조적공사, 석공사, 금속공사 미장공사, 가설공사 등	식	1	1	-	기시공 완료 (기성 수금 완료)
	933 정거장	조적공사, 석공사, 금속공사 미장공사, 가설공사 등	식	1	1	-

위 치		공 종		단위	계약	시공	잔여량	비 고
전기 분야	정거장 설비공사	932정거장 전기설비공사	전기실 간선설비공사	면	20	20	-	B1전기실 장비설치
			전기실 접지설비공사	m	664	664	-	B1전기실접지
			전력간선설비공사	m	7,538	6,779	759	B1,2전기실 장비설치
			전등설비공사	m	3,424	1,712	1,712	B1 대합실 배관배선
		933정거장 전기설비공사	전기실 간선설비공사	면	20	20	-	B1전기실 장비설치
			전기실 접지설비공사	m	38	38	-	B1전기실접지
			전력간선설비공사	m	13,822	12,437	1,385	B1,2전기실 장비설치
			전등설비공사	m	5,808	1,576	4,232	B1 대합실 배관배선
		전기실BUS DUCT 설치공사		식	1	-	1	전기실 Bus Duct
	본선 전기 설비 공사	932정거장 본선전기 설비공사	본선터널 전등설비공사	m	5,730	4,011	1,719	본선터널 애자랙크 설치 ow전선포설
			본선환기실 전등,전열설비공사	식	1	1	-	환기구 접지공사
		933정거장 본선전기 설비공사	본선터널 전등설비공사	m	7,185	7,185	-	본선터널 애자랙크 설치 ow전선포설

□ 예비준공검사 결과 및 조치계획

○ 9차공사 잔여공사 (931S2E2 환기구 중간슬라브, 환기구 덕트, 건축, 기계, 설비, 전기)에 대하여 공정계획 재검토 등을 통해 준공대책 마련 필요.

○ 토목 구조물, 건축, 기계, 설비, 전기 등 현재 추진 공종에 대하여 시공의 정확도 및 안전 시공이 요구되니 현장관리 철저 필요.

붙 임 : 예비준공검사 서류 1부.  끝.