투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	유입동외 2개소 도장공사 설계변경 시행 및 계약의뢰

우리 센터에서 시행중인 『유입동외 2개소 도장공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산) 시행 및 계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 합니다.

가. 공 사 명 : 유입동외 2개소 도장공사

나. 도 급 자 : 현대산업안전(주) 대표 전태환

다. 공사기간 : 2017. 04. 03 ~ 2017. 06. 01

라. 설계변경 금액

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
총 공 사 비		97,380,000	112,850,000	증)15,470,000
도급비	공 급 가 액	88,527,273	102,590,910	증)14,063,637
	부가가치세	8,852,727	10,259,090	증)1,406,363
	계	97,380,000	112,850,000	증)15,470,000

마. 변경사유 : 시공물량 증․감 반영

바. 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 공통분야 유지보수, 시설비

붙임  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 변경설계서 1부.

3. 변경방침서 1부

4. 설계변경 검토서 1부.  끝.

	시설보수과장
★주무관	김근모		시설보수과장	05/10 윤승범
협조자	주무관	최승룡
시행	시설보수과-3130	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2576	/전송	02-2211-2579	/	geunmo@seoul.go.kr	/	대시민공개