문서번호	도로보수과-4656
결재일자	2017.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
최완		代이화신	05/12 代박대군
협 조

2017년도 특별시도상에 설치된

『맨홀 정기점검용역(외관상태조사)』추진 계획

2017. 5

북부도로사업소

[도로보수과]

2017년 맨홀정기점검(외관상태조사) 용역발주 계획

’17년 맨홀정기점검(외관상태조사)용역을 발주계획을 수립 시행하여 시도상 불량 맨홀관리에 철저를 기하고자 함

관련근거

○ 서울특별시 도로상 맨홀정비 및 관리지침(2016. 7. 20)

○ 노후포장도로(불량맨홀) 추진계획(도로관리과-753, 2017. 1.11)

○ 도로보수과장 회의 및 결과자료(2017. 4. 12)

맨홀관리 현황

○ 자치구별 맨홀 설치현황

구분	총계	종로구	성북구	강북구	도봉구	노원구
개소	15,725	3,636	3,711	2,675	2,083	3,620

○ 자치구별 맨홀 종류별 현황

구분	총계	상수도	하수도	통신	전기	도시가스	지역난방	기타
개소	15,725	5,682	4,664	3,521	942	598	67	251

용역업체 선정시의 문제점

○ 건설기술진흥법 근거에 따라 시행하고 있으나 맨홀분야는 사업수행능력 평가기준이 없어 평가 불가하여 1억이상의 발주는 불가함

구 분	선정절차 및 주요평가내용	관련규정	입찰가능업종
2억원이상 (필요시)	- 기술자평가 ; 사업수행계획, 면접 사업수행능력 : 유사용역실적 등 적격심사 : 입찰가격, 경영상태 등	- 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 사업수행능력 세부 평가기준	안전진단전문기관
1억원이상	사업수행능력 : 유사용역실적 등 적격심사 : 입찰가격, 경영상태 등
1억원미만	- 적격심사 : 입찰가격, 경영상태 등	- 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준	안전진단전문기관 시설물유지관리업

발주계획

○ 맨홀분야는 사업수행능력 평가기준이 없으므로 선정절차 기준에 맞도록 1억미만 2개구역으로 나누어 발주

- 1구역(7,347개소) : 종로구, 성북구,

- 2구역(8,378개소) : 강북구, 도봉구, 노원구

○ 용역세부현황

- 용역발주 사업비 현항                                     (단위:백만원)

구분(자치구)	총용역비	용역비	기타(이전비)
총계	200	198	2
1권역(종로,성북)	100	99	1
2권역(강북,도봉,노원)	100	99	1

- 용역발주 물량

구분(자치구)	조사물량(개)	비 고
총계	7,800
1구역(종로,성북)	3,900	등급판정(C,D,E급)
2구역(강북,도봉,노원)	3,900	등급판정(C,D,E급)

※ 용역수행시 A,B등급은 육안점검으로 갈음(조사표 작성 제외)

- 용역기간 : 착공일로부터 11월30일까지

- 입찰참가자격

· 입찰참가등록마감일 기준 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제9조에 의한 안전진단전문기관(교량 및 터널)으로 등록된 업체 또는 시설물유지관리업체로서 입찰공고일 전일부터 입찰일까지 주된영업소가 서울특별시에 소재한 업체

- 예산과목

· 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물관리(도시개발),

노후포장도로정비공사, 시설비

맨홀정기점검(외관조사상태) 용역 주요내용

○ 맨홀점검 종류 및 주요내용

- 점검수준 및 방법 : 서울시 지침에 의한 맨홀 외관상태조사 시행

- 점 검 자 : 도로관리청 주관(용역업체)

- 점검대상 : 2016년 하반기 맨홀정기점검(외관상태조사) 용역시 조사한

물량(1,530개소-D,E급) 제외한 나머지 맨홀물량에 대해여

전수조사 실시(A,B급은 육안점검, C,D,E급은 조사표 작성)

- 점검 세부내용 :

① 정기점검(맨홀외부) 조사표 작성(C,D,E급)

② 등급판정(A,B,C,D,E급)→D, E등급의 경우 우선 정비시행 대상

※ 2개월 1회이상 정기점검 조사표 제출 의무화하여 D,E급 정비물량 확보

구 분	내 용	선정대상
A급	뚜껑의 진동‧소음이 없고 노면과 뚜껑면이 완벽하게 일치된 맨홀	×
B급	뚜껑의 진동‧소음이 없고 노면과 뚜껑면이 완벽하게 일치(10mm미만)되지는 않으나 안전사고 발생위험이 없는 맨홀	× (지속관찰)
C급	맨홀 뚜껑의 진동‧소음‧열림 등으로 인한 민원 유발 맨홀 (※맨홀 노후는 관리기관으로 사전 자재 공급‧협의 요함.)	○
D급	돌출, 침하 등(B급이상) 맨홀단차(뚜껑면과 도로포장면) 10mm이상 발생 맨홀 (※맨홀받침~뚜껑간 단차발생 경우 관리기관 사전 자재 공급‧협의 요함.)	○
E급	맨홀주변 도로파손(탈락)/망상균열 발생 맨홀	○

③ 맨홀관리 대장 작성

④ 서울시 포장도로관리시스템에 점검결과 입력

향후계획

○ 2017. 05월 : 기술용역 타당성심사 요청(기술심사담당관)

○ 2017. 05월 : 용역발주(재무과)

○ 2017. 06월 : 계약 및 착공

○ 2017. 06~11월 : 과업수행 및 용역완료

붙 임 : 1. 도로상 맨홀정비 및 관리지침 개정 1부.

2. 맨홀정기점검 예산 1부.

3. 도로보수과장 회의자료 1부.

4. 맨홀정기점검 과업지시서 1부.

5. 용역설계서 각1부.

6. 등급판정 기준 개선(안) 1부.

7. 개정 점검조사표 1부.     끝.