문서번호	방재시설부-8385
결재일자	2017.5.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		치수시설과장	방재시설부장
조동협		조성만	05/17 남궁용
협 조

도림천 상류 관악산 저류조 설치공사

서울대정문 앞 저류조 품질시험비 및 시공상세도 작성비용 정산 검토 보고

2017. 5

도시기반시설본부

(방재시설부)

도림천 상류 관악산 저류조 설치공사

서울대 정문 앞 저류조 품질시험비 및 시공상세도 작성비 정산 검토 보고

본서울대 정문 앞 저류조 설치공사가 완료되어「품질시험비 및 시공상세도」작성비용 정산 검토 보고임

공사개요

○ 위    치 : 관악구 관악로 1 서울대학교 내 ․외 및 주변

○ 규    모 : 빗물저류조 설치 65,000㎥

- 서울대 정문 앞 : 40,000㎥

- 서울대 내 : 25,000㎥(노천강당 20,000㎥, 공대폭포 5,000㎥)

○ 공사기간 : 2012. 1. 6 ~ 2017. 5.30

○ 도 급 액 : 41,424백만원

○ 시공사 / 감리사 : 남광토건(주)외 1개사 / (주)신명건설기술공사

보고내용

○ 관련근거

- 건설기술진흥법 제56조(품질관리비용의 계상 및 집행) 같은법 시행규칙 제53조(품질관리비의 산출 및 사용기준) 및 별표 6

- 건설기술진흥법 제48조(설계도서의 작성 등) 및 같은법 시행규칙 제42조(시공상세도면 작성 등), 건설시공상세도 작성지침(국토해양부 고시´10. 6.28)

○ 방재시설부-8830호('15. 7. 3)로 서울대 내 저류조 설치공사의 품질시험비 및 시공상세도 작성비용을 기 정산한 바 있으며 금번 서울대 정문 앞 저류조 설치공사가 완료되어 그 비용을 정산하고자 함

- 품질시험 정산 내역

공 종	단위	당초	변경	증․감(△)	비고
서울대 정문 앞 저류조
1. 품질시험비
1) 품질시험비 및 기타품질관리시험비	식	1	-	△1
2) 의뢰시험	식	-	1	1	품질시험소 시험불가
3) 슬럼프/염화물/공기량	회	-	127	127
4) 압축강도	회	-	312	312
5) 공시체 제작	회	-	312	312
6) 현장밀도시험	회	-	64	64

※ 당초 품질시험비는 1식 단가로 콘크리트 압축강도 시험만 계상되어 있었으나 품질시험기준에 따라 품질시험을 실시함

- 시공상세도 작성 정산 내역

공 종	단위	당초	변경	증․감(△)	비고
서울대 정문 앞 저류조
2. 시공상세도 작성
1) 단순	매	360	120	△240
2) 보통	매	360	38	△322
3) 복잡	매	182	561	379

※ 정산 결과 단순, 보통은 감소하였으나 복잡도면(철근상세도) 증가함

- 공사비 증․감내역

공 종	당초	변경	증․감(△)	비고
서울대 정문 앞 저류조	126,791,532	159,510,656	32,719,124
1. 품질시험비	1,250,074	17,904,397	16,654,323
2. 시공상세도 작성비	125,541,458	141,606,259	16,064,801
제 경 비	80,228,468	95,909,344	15,680,876
도 급 액	207,020,000	255,420,000	48,400,000

처리방안

○ 건설사업관리자의 검토내용이 적정하다 판단되므로 실정보고 사항을 승인조치하고 추후 설계변경시 반영하도록 하고자 함.

붙임  건설사업관리단 검토의견 1부.  끝.