문서번호	한옥조성과-5512
결재일자	2017.5.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	한옥조성팀장	한옥조성과장		주택건축국장
김훈	이성호	진조평		05/17 정유승
협 조
	지역관광진흥팀장		고경인

- 조계사 주변 지구단위계획 재정비 용역 -

기술용역 설계변경(용역기간 연장) 시행계획

2017. 5

주택건축국

(한옥조성과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	자문위원회 개최를 통해 전문가 의견 반영 중
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

기술용역 설계변경(용역기간 연장) 시행계획

******************************************************************************************************

□ 과업개요

○ 과 업 명 :「조계사 주변 지구단위계획 재정비」용역

○ 용 역 사 : (재)한국산업관계연구원 및 ㈜수연종합건축사사무소

○ 용역비 및 과업기간 : 193백만원,  ‘16.01.22~‘17.05.22(16개월)

○ 주요 과업내용

- 문화재, 근·현대건축자산(역사도심기본계획) 보전 및 활용방안 마련

- 낙후된 도심 관광인프라 개선(관광버스 주차장 설치 적합여부 검토 등)

- 법난기념관 등 역사문화관광자원 조성에 따른 사업방식 및 건축지침 제시 등

□ 추진경위

○ ‘16.01.22      : 용역계약 및 착수

○ ‘16.01~’17.05 : 지구단위계획 재정비 추진

*************************************************************************************************************

□ 설계변경(안)

구분	변경전	변경후	비고
용역기간	‘16.01.22~‘17.05.22	‘16.01.22~‘17.11.22	180일 기간연장
용 역 비	193,000,000원(부가세 포함)		변경없음
용 역 사	(재)한국산업관계연구원, ㈜수연종합건축사사무소		변경없음
**********************************************************************************

□ 검토의견

○ 용역비 증감없이 용역기간을 연장하여 관련사업을 원활히 추진하고자 함. 끝.