문서번호	설비부-8263
결재일자	2017.5.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
성호준		유병기	05/18 권오식
협조

만리재로 보행환경개선 전기공사

관급자재(보행등) 구매 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 5.

도시기반시설본부

(설비부)

만리재로 보행환경개선 전기공사

관급자재(보행등) 구매 검토보고

만리재로 보행환경개선 전기공사 관급자재(보행등)구매에 대해 검토 보고 드림

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 만리재로 보행환경 개선 전기공사

○ 공사규모 : 가로등 개량 159본, 분전반 7면, 교통신호제어기 5개소 등

○ 공사기간 : `16.12.27. ~ `17.11.26.(1차 : `17.5.30.)

○ 도 급 비 : 861백만원(1차 : 530백만원)

○ 계 약 자 : (합)고려공업기업사

Ⅱ		그간 추진경위

○ `16.12.09. : 서울역고가 청파로 가로등 추가 요청(중구청)

○ `16.12.21. : 만리재로 가로등 회의결과 알림(마포구청)

- 3개 구청(중구청, 마포구청, 용산구청) 보행등 설치 요구

○ `17.02.01. : 유지관리부서 합동회의 결과 보고

※ 유지관리부서인 구청 요구사항 반영하여 보행등 설치

○ `17.03.03. : 청파로 가로등 교체 추가 시행(도로관리과)

Ⅲ		검토내용

○ 보행등 수량 : 185개

- 가로등 수 : 185본[159(당초)+26(청파로 추가)]

○ 소요예산 : 98,207,470원

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액	비 고
보행등기구	LED 50W	개	185	378,000	69,930,000	3자단가
보행등 암	0.6m	개	185	150,000	27,750,000	3자단가
계					97,680,000
조달수수료	0.54%				527,470
합 계					98,207,470

※ 설치비 미포함

○ 검토결과

- 유지관리부서(중구청, 용산구청, 마포구청) 요구사항을 반영하여 보행등 설치를 위해 보행등 구매코자 함

Ⅳ		향후계획

○ `17.05. : 보행등 구매

○ `17.05. ~ 11. : 보행등 설치

○ `17.11. : 공사준공

붙임  1. 유지관리부서 합동회의 결과 보고 1부.

2. 관련 공문 3부.

3. 가격산출 1부.  끝.