문서번호	정수시설과-1768
결재일자	2017.5.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김종원		김긍채	05/18 임철수
협 조
	주무관			하수용
	주무관			함인석

『인조잔디구장 조성공사』

감독 수행 보고(3차)

2017.  5.

정수시설과

『인조잔디구장 조성공사』

감독 수행 보고(3차)

인조잔디구장 조성공사 감독업무 수행중 공사물량의 변경(증가) 및 관급자재인 인조잔디 구매계약 지연으로 인해  준공기한을 연기하고자 함.

□ 계약현황

○ 공 사 명 : 인조잔디구장 조성공사

- 공사규모 : 축구장(98m×64m) → 100m×64m

○ 금     액 : 225,905천원

○ 계약 기간 : 2017. 4.10 ~ 5.20

○ 계약 업체 : 세광건설(주) 대표자 민장식

□ 준공기한

○ 당초 : 2017.5.20.→ 변경 : 2017.5. 30

□ 준공기한 연기 사유

○ 인조잔디구장의 축구장 가로측 연장 증가(98m→100m)

- 당초 축구장 가로측 연장를 98m 설계하였으나, 국제규격인 100m로 변경하고 측구배수로의 증설로 인한 공사물량 증가

○ 관급자재(인조잔디) 계약 지연

- 관급자재인 인조잔디 국제입찰 공개경쟁입찰로 공고기간(15일)연장으로 (긴급공고, 국내입찰 5일)로 인한 물품계약(‘17.4.28) 지연으로 후속 공정인 배수블럭 설치 지연

□ 귀책사유 : 강북아리수정수센터

□ 지체 상금 : 미부과

별첨 : 합의서 1부. 끝