문서번호	환경과-14786
결재일자	2017.5.19.
공개여부	부분공개(6)

주무관	에너지관리담당	환경과장	도시환경국장
유태상	이종철	지덕환	05/19 최성태
협 조

2017년 취약계층 LED조명 교체사업 추진 계획

2017. 5.

도 시 환 경 국

환경과

2017년 취약계층(복지시설, 저소득층) -

LED조명 교체사업 추진 계획

우리구 관내 취약계층을 대상으로 기존 조명을 고효율 친환경 LED 조명으로 교체해 주는 「2017년 취약계층 에너지복지사업」을 추진하여 에너지비용 절감은 물론, 쾌적한 생활환경 개선에 기여 하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2014-95호)

서울광원의 LED교체 기본계획(행정제1부시장 방침 제77호(‘14.3.10.)

2015년 서울특별시 LED 조명 보급기준(고시 제2015-237호)

2017년 취약계층 에너지복지사업 수행지침(산업통상자원부 지침(‘17.3.)

Ⅱ		사 업 개 요

사업명 : 2017년 취약계층 LED조명 교체사업

❍ 대 상

- 복지시설 : 26개소(경로당 4개소, 복지관 5개소, 어린이집 17개소)

- 저소득층 : 73가구

❍ 사업기간 : 2017. 5. ~ 8.

❍ 총 사업비 : 141백만원(국 98,700천원, 시 21,150천원, 구 21,150천원)

- 복지시설 LED 조명 교체공사 : 105백만원

- 저소득층 LED 조명 교체공사 :  36백만원

- 예산과목 : 환경과, 에너지수급안정, 에너지이용증진, 취약계층

에너지복지, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅲ		추 진 경 위

2016.05. : 2017년도 취약계층 에너지복지사업 계획서 제출(서울시)

2016.10. : 2017년도 취약계층 전력효율향상사업 확정(산업통산자원부)

2016.12. : 2017년도 취약계층 에너지복지사업 구비 예산확보

2017.04. : 사업비(국비, 시비) 예산 배정 완료

Ⅳ		세부추진 계획

사업추진 대상

❍ 복지시설 : 사회복지사업법 제34조(사회복지시설의 설치)에 따라

설치 · 운영하는 시설 - 26개소 1,057개

월곡1동 경로당	월곡2동 경로당	목화 경로당	성암 경로당	정릉노인 요양원	안암 노인의집	장위 노인의집	정릉 노인의집	방과후 어린이교실
26	23	8	10	190	7	9	47	13
정릉중앙 어린이집	짐랜드 어린이집	성일 어린이집	래미안 어린이집	열매 어린이집	예꼬 어린이집	희망 어린이집	새조양 어린이집	휴먼빌 어린이집
46	135	48	27	44	20	3	56	21
세안아이 어린이집	성복 어린이집	자연과아이들 어린이집	해피래미안 어린이집	아트 어린이집	푸른솔 어린이집	노란민들레 어린이집	파란나라 어린이집	계
13	102	32	17	14	43	45	58	1,057개

❍ 저소득층 : 국민기초생활보장법 제7조(급여의 종류) 중 생계 · 의료 ·

주거급여 수급권자의 가구 - 73가구 369개

LED 40W 거실등	LED 30W 주방등	LED 25W 방등	LED 16W 세면등	LED 10W 컵벽부등	LED 10W 망벽부등	LED 10W 원형직부	LED 12W 센서	LED 8W 램프	계
21	50	146	4	5	1	105	23	14	369개

❍ 지원제외 시설

- 전기시설을 포함한 리모델링 계획 또는 이전계획이 있는 시설

- 최근 5년 이내 교체한 조명(국비, 지방비, 자비, 후원 등)

사업추진 방법

- 소요금액 : 140,987,850원                                (단위 : 원)

구분	계	공사비	물품구매	비고
복지시설 LED조명 교체공사	104,997,810	20,504,000	84,493,810
저소득층 LED조명 교체공사	35,990,040	6,193,000	29,797,040
계	140,987,850	26,697,000	114,290,850

- 물품 구매방법 : 조달구매(3자단가계약)

- 교체공사 계약방법 : 수의계약

• 계약근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항제5호

LED조명 제품 선정 기준

❍ 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정(산업통상자원부 고시)에

의거 「고효율에너지기자재 인증서    」를 획득한 제품

❍ 2015년 서울특별시 LED조명 보급기준 이상의 성능을 가진 제품

구 분	컨버터 내장형	매입형 및 고정형		센서등	직관형	투광등	비고
광효율(lm/W)	80이상	10W초과 30W이하	90이상	80이상	130이상	95이상
		30W초과 60W이하	95이상
연색성(Ra)	80이상	80이상		80이상	80이상	75이상

※ 광효율 : 소비전력 1W당 빛의 밝기가 어느정도 나오는지 알려주는 물리량, 높을수록 좋음

연색성 : 물체의 색 재현 충실도를 나타내는 광원의 성질, 자연광(100)에 가까울수록 좋음

Ⅴ		기 대 효 과

기존 조명을 고효율 LED조명으로 교체하여 관리비용 절감

구분	계	복지시설	저소득층	비고
전력사용량(Kwh/년)	135,408	78,624	56,784	일14시간, 월26일
전기요금(천원/년)	13,540	7,862	5,678	1Kwh당 100원 적용

에너지를 절감하여 서울시 원전하나줄이기 사업에 기여함

노후 등기구 교체와 적정 밝기 확보로 복지시설 및 저소득층 환경개선

Ⅵ		추 진 일 정

2017.05. : LED 조명 교체공사 발주 및 관급자재 조달구매 요청

2017.06. : LED 조명 교체공사 시행

2017.08. : LED 조명 교체공사 완료

Ⅶ		행 정 사 항

어르신복지과 : 복지시설 및 경로당 LED조명 교체 공사시 협조

여 성 가 족 과 : 어린이집 LED조명 교체 공사시 협조

동주민센터 : 저소득층 LED조명 교체 공사시 협조

재   무   과 : LED조명 교체공사 계약 및 관급자재 구매 협조

붙임  1. 2015년 서울특별시 LED조명 보급기준 1부.

2. 2017년 취약계층 에너지복지사업 수행지침 1부.

3. 2017년 복지시설 LED조명 교체 조사자료 3부.

4. 2017년 저소득층 LED조명 교체 조사자료 1부.  끝.