투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	치수과장
(경유)
제목	변경계약체결 통보 - 여의샛강 유지유량 확보사업의 소규모 환경영향평가 용역

1. 치수과-1835(2017.5.11.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 다음과 같이 변경계약이 체결되었음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 계약현황

용 역 명	여의샛강 유지유량 확보사업의 소규모 환경영향평가 용역
계약상대자	(주)유신 (대표 : 성낙일)
계 약 금 액	금69,340,000원(금육천구백삼십사만원)
계 약 일 자	2016.12.20.
용 역 기 간	2016.12.21. ~ 2017.05.19.

나. 변경내역 : 금액 변경(증3,277,000원)

변 경 내 역	변경전	변경후
계 약 금 액	69,340,000	72,617,000

다. 변경내역 : 기간 변경(2016.12.21. ~ 2017.08.19.)

변 경 내 역	변경전	변경후
용 역 기 간	2016.12.21. ~ 2017.05.19.	2016.12.21. ~ 2017.08.19.

라. 변경사유

- 여의샛강 오염원인 파악을 위한 추가조사에 따른 계약금액 변경.

- 추가조사 기간 및 관련부서 협의 기간 반영에 따른 기간 연장.

붙     임 : 용역변경계약서 1부.  끝.

	총무부장
주무관	주홍열		총무과장	박병현		총무부장	05/22 박기용
협조자
시행	총무과-8323	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/		/	부분공개(5)