투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(1차) 시행 - 2017년 도로손상부분 긴급복구공사(연간단가)

우리사업소에서 시행중인 『2017년 도로손상부분 긴급복구공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(1차)을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2017년 도로손상부분 긴급복구공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2017. 03. 02~ 2017. 12. 31

다. 계약금액 : 금661,364,760원

라. 도 급 자 : ㈜대중건설 대표 배형학, 조찬신

마. 설계변경사유

○ 도로소파, 망상균열 등 포트홀 예상구간 소규모 정비물량이 당초 예상물량보다 증가 발생

○ 서울형포장구간, 버스전용차로 및 교차로 소성변형 발생구간 단면설계를 위한 아스콘코아 채취 물량 감소 발생

바. 변경내역                                          (단위 : 원)

공 종	금 액(원)			비 고
	당 초	변 경	증 ․ 감
계	￦1,842,864,760	￦1,842,864,760	-
도급비	￦661,364,760	￦661,364,760	-
관급비	￦505,500,000	￦505,500,000	-
이전비	￦676,000,000	￦676,000,000	-

사. 예산과목

- 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물 관리, 노후포장도로정비공사, 시설비(￦1,751,000천원)

- 도로시설시설물관리, 도로및도로부속시설물, 도로함몰예방사업, 일반운영비, 사무관리비(￦200,000천원)

붙임 : 1, 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.   끝.

주무관	함창수		도로보수과장	이상호		성동도로사업소장	05/23 이종엽
협조자	관리단속과장	박영종
시행	도로보수과-2432	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 성동도로 (용답동)	/
전화	02-2210-1532	/전송	02-2210-1549	/		/	대시민공개