문서번호	문화융합경제과-1912
결재일자	2017.5.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	영상산업팀장	문화융합경제과장
정해유	고채현	05/23 김경탁

서울시네마테크 건립부지 문화재시굴 조사계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

시네마테크 건립부지 문화재시굴 조사계획

관련법에 의거 서울시네마테크 건립부지내 문화유적을 확인하기 위해 문화재 시굴조사를 추진하고자 함.

□ 추진 근거

○ 문화재보호법 제13조(역사문화환경 보존지역의 보호)

○ 매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행령 제4조(지표조사의 대상) 제1항 제4호 라목

서울특별시의 퇴계로·다산로·왕산로·율곡로·사직로·의주로 및 그 주변지역으로서

서울특별시의 조례로 정하는 구역에서 시행되는 건설공사

○ 서울특별시 문화재 보호조례 제50조(매장문화재 지표조사) 제2항

서울특별시의 퇴계로·다산로·왕산로·율곡로·사직로·의주로 및 그 주변지역으로서

별지 제5호서식이 정하는 서울성곽 내부 구역에서 시행되는 건설공사

초동 64-11

○ 시굴조사 지역 : 서울특별시 중구 초동 64-11번지(초동공영주차장)

□ 조사 개요

○ 조사대상 : 중구 초동 64-11(804.1㎡)

○ 조사기간 : 시굴신청일로부터 40일

시굴조사 허가 신청		문화재청 허가 후 시굴조사 착수		검토보고서 작성		완료신고		현장 복구
5일(5월말)		15일(6월초)		5일(6월중)		5일(6월중)		10일(6월말)

※ 휴무일(국공휴일)을 포함한 연속일정이지만, 휴무일 작업은 진행 않음

※ 시굴조사 결과 정밀발굴조사 등이 필요한 경우, 이후의 과정은 별도 진행함

○ 계약방법 : 수의계약

- 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조          (수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제4호 하목

「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 제11조에 따른 문화재 발굴(조사)용역

○ 선정근거

- 선정방법은 문화재청장이 지정․고시한 전문기관 중 선정

- 서울시 지표조사 수행실적 및 조사비용 등을 고려하여 업체 선정

○ 조사내용

- 유구 확인을 위한 발굴조사

- 문화유적의 정확한 분포범위와 성격 규명

○ 조사방법

- 시굴 면적 : 55㎡ ~ 60㎡

→ 굴착 시굴갱 6m x 2.5m(면적15㎡) 1개소, 8m x 2.5m(면적20㎡), 3m x 2.5m(면적9㎡) 2개소 등 총 4개소

※ 매장문화재 조사 및 보호에 관한 법률 시행규칙에 따라, 시굴조사의 허가면적은 10%(80㎡) 내외이지만, 시설물 운영 등 현 상황은 55㎡ ~ 60㎡까지만 굴착 가능

○ 소요예산 : 16,500천원

사 업 명	단위	수량	예산액	비고
서울시 시네마테크 건립 부지 시굴조사 용역	식	1	16,500천원

※ 소요예산에 시굴조사 전 원상태 복구비용 포함

○ 예산과목

- 서울시 시네마테크 건립, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 행정사항

○ 관계 부서 협조 요청

- 중구청 주차관리과 협의 및 협조

‧ 문화재시굴조사 일정 협의

‧ 공영주차장 1층 일부 폐쇄 요청

‧ 문화재시굴조사에 대한 지역주민 공지 요청

- 서울시 재무국 재무과 계약 의뢰

‧ 조사업체 계약 체결 예정(5월말)

붙임 : 비교견적 각 1부.  끝.