문서번호	토목과-6069
결재일자	2017.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		도로조명팀장		토목과장		안전건설교통국장
김학민		정찬재		박주완		05/23 김재겸
협조
	도시안전팀장		김용중
	교통시설팀장		방돈석

★ ◉

- 2017년 가로등 및 기전시설물 정비공사(단가계약) -

설계변경(제1차) 보고

성   동   구

(토 목 과)

설계변경(제1차) 보고

1. 공사개요

○ 공 사 명: 2017년 가로등 및 기전시설물 정비공사(단가계약)

○ 공사개요: 가로등주 정비 등 7종

○ 공사기간: 2017.2.16. ~ 12.31.

○ 도 급 비: 금93,625,590원

○ 도 급 자: 동하시티개발주식회사 대표자 윤종사

2. 설계변경 내용

○ 금호로(금호 유수지 앞) 차로 확장 설치 가로등 이설 등 가로등 정비물량 증ㆍ감

- 가로등주 설치(8~9M(기계화,200W)): 당초 1본 → 변경 10본(증 9)

- 가로등주 철거(5~7M(기계화,200W)): 당초 1본 → 변경 6본(증 5)

- 가로등주 철거(8~9M(기계화,200W)): 당초 1본 → 변경 14본(증 13)

- 배관공사(PE42C): 당초 5m → 변경 240m(증 235)

- 케이블 설치(CV2.5㎟*2C): 당초 5m → 변경 230m(증 225)

- 케이블 설치(CV6㎟*1C 4열동시): 당초 0m → 변경 190m(증 190)

- 매설표지시트설치(경고테이프(200*250)): 당초 5m → 변경 300m(증 295)

- 조명타워설치(12M POLE): 당초 0m → 변경 2m(증 2)

- 투광기설치(200W 4등): 당초 0조 → 변경 2조(증 2)

- 조명타워기초설치: 당초 0개 → 변경 2개(증 2)

3. 변경사유

○ 금호로(금호 유수지 앞) 차로 확장 가로등 이설

⇒ 금호로(금호유수지 앞) 차로 확장 계획(토목과-4891호,'17.4.21.)

○ 송정동 건영아파트 앞 좌회전/유턴차로 설치 가로등 이설

⇒ 도로교통소통 개선사업(송정동) 건영아파트 앞 좌회전/유턴차로 설치 계획(교통행정과-46508호,'16.9.8.)

○ 용산구 경계옹벽 개선사업 분전반 설치, 개량

⇒ 용산구 경계 옹벽 개선 전력 인입공사 추진 계획(토목과-2517호,'17.3.3.)

○ 안전한 지역사회 만들기 모델사업 응봉사거리 횡단보도 조도개선

⇒ 5대분야 사망자수 감축을 위한『안전한 지역사회 만들기 모델사업』 실시(안전관리과-5228호,'17.3.31.)

○ 기타 가로등 시설물 정비공사 물량 증ㆍ감

⇒ 가로등 시설물정비사항 보고(토목과-2339호,5213호:‘17.2/28.,4/28.)

4. 조치계획

○ 본 공사 설계변경에 따른 사업비 증액 72,694천 원(도급비 72,694천 원)은 금호로(금호 유수지 앞) 차로 확장 등 예산을 활용하여 설계변경 조치

○ 설계변경 내역

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총공사비	94,363,590	167,058,000	증) 72,694,410	ㆍ가로등 이설 등 가로등 공사 물량 증ㆍ감으로 인한 변경
도 급 비	93,625,590	166,320,000	증) 72,694,410
관 급 비	-	-	-
이 전 비	738,000	738,000	-

※ 금호로(금호 유수지 앞) 차로 확장 가로등 이설(30,000,000원),송정동 건영아파트 앞 좌회전/유턴차로 설치 가로등 이설(23,371,490원),용산구 경계옹벽 개선사업 분전반 설치, 개량(1,934,700원),응봉사거리 횡단보도 조도개선(17,993,210원),
기타 가로등 시설물 정비공사 물량 증ㆍ감(-604,990원)

○ 예산과목

- 교육지원과, 평생학습체제구축, 평생학습활성화, 독서당 인문아카데미센터(평생학습관)운영, 시설비

- 도시교통본부, 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리강화, 도로교통 소통 개선, 시설비

- 토목과, 지방도건설 및 확대포장, 도로관리사업, 용산구 경계 옹벽 개선사업(이월), 시설비

- 안전관리과, 재해 및 재난예방, 재난예방, 안전관리 및 복구지원, 시설비

- 토목과, 지방도건설 및 확대포장, 도로조명관리, 가로등 및 기전시설물정비공사, 시설비및부대비,시설비

붙임 1. 변경 내역서(제1차) 1부.
2. 검증 확인서 1부.