투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	설계변경(총차2회, 1차2회 : 정산) 시행 및 변경계약 의뢰(청계천 생태환경 개선공사 2단계)

청계천 생태환경 개선공사(2단계)의 설계변경(총차2회, 1차2회 : 정산) 시행에 따른 변경계약을 다음과 같이 의뢰하니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 청계천 생태환경 개선공사(2단계)

2. 도 급 자 : 충정종합건설주식회사 대표자 김성복

3. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증ㆍ(감)
도급비	총차	2,080,507,000	2,080,133,000	(감)374,000
	1 차	872,828,000	796,920,000	(감)75,908,000

- 변경사유 : 실정보고 승인 사항과 시공 물량 정산(1차) 등 반영

4. 공사기간 : 변경없음

- 총 차 : 2016. 08. 26. ~ 2018. 02. 25.

- 1 차  : 2016. 08. 26. ~ 2017. 05. 26.

- 2 차  : 2017. 02. 28. ~ 2017. 10. 31.

5. 예산과목 : 치수및하천관리, 하천복원및정비, 청계천개선보완  사업, 시설비및부대비, 시설비

붙 임 : 1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 감독기관(공단) 문서 및 보고서 1부.

3. 설계변경내역서(총차2회, 1차 2회 : 정산) 1부.

4. 시공사 관련문서, 합의각서 1부.  끝.

							방재시설부장
주무관							박중모			치수시설과장					조성만					방재시설부장					05/24 남궁용
협조자
시행			방재시설부-8892									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동 96번지) 프리미어플레이스빌딩 14층															/
전화		3708-8772						/전송			3708-8756					/	p05480548@seoul.go.kr												/	대시민공개