문서번호	설비부-8645
결재일자	2017.5.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
성호준		유병기	05/25 권오식
협조

만리재로 보행환경개선 전기공사(1차)

설계변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 5.

도시기반시설본부

(설비부)

만리재로 보행환경개선 전기공사(1차)

설계변경 검토보고

『만리재로 보행환경개선 전기공사(1차)』의 설계변경 사항을 검토하고 보고 드림.

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 만리재로 보행환경개선 전기공사

○ 공사규모 : 서울역 고가 접속부 ~ 마포구 공덕오거리

- 가 로 등 : 가로등 개량(LED 100W, 9m) 159본, 가로등 분전반 7면 등

- 교통신호 : 교통신호기 5개소 등

○ 공사기간 : `16.12.27. ~ `17.11.26.(1차 : `17.5.30.)

○ 도 급 비 : 861백만원(1차 : 530백만원)

○ 계 약 자 : (합)고려공업기업사

Ⅱ		주요내용

□ 관련근거

○ `17.05.24. : 만리재로보행환경개선 전기공사(장기계속) 설계변경 요청(1차)(고려17-0524-1)

□ 검토내용

○ 설계변경 사유 : 현장여건에 따른 1차분 물량내역 변경

○ 변경금액

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
총 차	860,828,980	860,828,980	0
1 차	530,000,000	93,150,000	감)436,850,000

※ 공사기간 변경 없음

Ⅲ		조치의견

○ 1차공사 준공기한(`17.5.30.)까지 시공한 물량으로 1차 공사 타절하고 감액분은 2차공사에 반영하여 시행코자 함

Ⅳ		향후계획

○ `17.05. : 1차 설계 변경 및 준공

○ `17.06. : 2차 계약

○ `17.11. : 2차 준공

붙임  1. 관련공문 사본 1부

2. 변경내역서 1부.  끝.