투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 - 관급자재 레미콘(납품기한 변경) 나들목 증설공사 개화 3차

1. 치수과-1986(2017. 5. 25.)호와 관련입니다.

2. ｢관급자재 레미콘(납품기한 변경) 나들목 증설공사 개화 3차｣에 대해 아래와 같이 변경계약 하고자 합니다.

가. 납품기한 변경 내역

납품요구번호	물품식별번호	품명	단위	수량	납 품 기 한		비고
					당초	변경후
12-16-1-49141-01	10063106	레미콘	㎥	360	2017.05.31	2017.12.31
12-16-1-49137-00	10063866	이형철근	톤	6,683	하치장상차도	2017.12.31
	10063867		톤	18,289
	10063868		톤	24,355
	10063869		톤	14,164
	10063870		톤	6,251

나. 변경사유 : 사용시기 미도래.

붙  임 : 변경요청 공문 1부.  끝.

주무관	김윤미		총무과장	05/25 박병현
협조자
시행	총무과-8689	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 한강사업본부 총무부 총무과	/
전화	02-3780-0719	/전송	02-3780-0740	/	hjymhg@seoul.go.kr	/	대시민공개