문서번호	시설과-2933
결재일자	2017.5.26.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	관리부장
한상길	공헌구	05/26 김명용
협 조

「늑대.여우사 환경개선공사」

준공기한 연기 검토 보고

2017. 5.

서울대공원

시설과

「늑대.여우사 환경개선공사」

준공기한 연기 검토 보고

명에의거「늑대.여우사 환경개선공사」감독업무 수행 중 다음과 같이 준공기한 연기 사유가 발생하여 보고합니다

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 늑대·여우사 환경개선공사

□ 공사기간 : 2016. 5. 2. ∼ 2017. 5. 31.

□ 계약금액 : ***************

□ 계 약 자 : ****************

Ⅱ		연기사유

□ 준공기한 연기 요청 사유

- 시험방사를 앞두고 실시한 일제점검 및 예비준공검사시 지적사항에 대하여 추가 보완토록 결정됨에 있어 절대공기 부족

☞ 관련근거 : 시설과-2909(‘17.5.25.) 정책회의 결과

Ⅲ		조치의견

□ 준공기한 연기

-  위와 같은 사유로 준공기한을 아래과 같이 연기코자 함.

구 분	변 경 사 항		비고
	당 초	변 경 후
공사기간	2016. 5. 2. ~ 2017.5.31.	2016. 5. 2. ~ 2017. 6. 30.

- 지체상금 부과여부 : 미부과.   끝.