투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	2017년 도로기전시설물유지보수공사(연간단가) 설계변경(1차)

우리사업소에서 시행중인 2017년 도로기전시설물 유지보수 공사(연간단가) 설계변경을 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2017년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2017. 2. 28 ~ 2017 .12 .31

다. 계 약 자 : 산포전기 (대표 박숙희)

라. 설계변경사유 : 1~2차 작업완료에 따른 시공물량 내역 조정

마. 계약금액

구분	당초	변경	증감	비고
도급비	217,757,860	217,757,860	-

바. 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물일상유지보수, 시설비

붙임문서 :  설계변경 내역서 1부.   끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	김해중		기전과장	임태수		남부도로사업소장	05/29 이덕기
협조자	관리단속과장	송재우
시행	기전과-2801	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145	/
전화	3284-5456	/전송	832-5470	/	win686@seoul.go.kr	/	부분공개(7)