투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	준공기한 연기요청(사천교확장 및 성능개선공사)

1. 시설보수과-4697(2017.5.29)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행하고 있는 「사천교확장 및 성능개선공사(장기계속)」와 관련하여 아래와 같이 준공기한을 연기코자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

-- 아  래 --

가. 공 사 명 : 사천교확장 및 성능개선공사(장기계속)

나. 계약업체 : 신안종합건설

다. 준공기한 연기내역

- 당 초 : (총차) 2016. 04. 12 ~ 2017. 10. 11

(1차) 2016. 04. 12 ~ 2017. 05. 31

(2차) 2016. 06. 01 ~ 2017. 10. 11

- 변 경 : (총차) 2016. 04. 12 ~ 2017. 10. 11 (변동없음)

(1차) 2016. 04. 12 ~ 2017. 07. 31

(2차) 2016. 08. 1 ~ 2017. 10. 11

라. 책임소재 : 발주처 귀책사유

마. 지체상금 부과여부 : 미부과

바. 준공기한 연기사유

- 유관기관(철도공사) 작업일정 조정에 따른 1차공사 공종 지연 발생으로 준공기한 연장

붙  임 :  1. 준공기한 연기 검토 보고 1부.

2. 준공연기신청서(신안) 1부.

3. 준공연기원 검토보고(감리단) 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	이동섭		주무관	김종성		시설보수과장	05/30 신동헌
협조자
시행	시설보수과-4711	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203 서부도로사업소 시설보수과	/
전화	02-300-8374	/전송	02-300-8384	/	lds0420@seoul.go.kr	/	부분공개(5)