투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(현장점검 지적사항 조치결과 제출 요청)

1.업무지시현장 : 강남순환도시고속도로 건설(8공구) 롯데건설(주),

주식회사 동명기술공단종합건축사사무소

2.작 성 일 자 : 2017-05-31

3.지 시 내 용 : 2017.5.30.(화) 현장점검 관련하여 다음사항을 지시하오니 업무에 착오없이 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 경량성토 구간 타설 즉시 상부 추락방지망 설치

- 근로자 안전을 위한 안전시설 설치 및 안전고리 체결 후 공사

나. 양재천 호안 사면 보강

- 당초 Seeding 예정이었으나 공사지연으로 사면 토사 노출

다. STA.0+780~0+900(골때려골프) 구간 우기 전 노출사면 복구 공정 촉구 및 추진계획서 제출(’17.6.5.까지)

라. 구룡지하차도 우수관로 부설 구간 빗물받이(연결관) 공사에 대한 장비, 인력 투입 보강

- 현재 장비 1대, 인력 2명이 공사 중으로 집중 호우 시 침수 우려

마. 민원발생에 따른 처리 요구 시 즉시 조치

- 공사구간 도로 평탄성 불량으로 동일 다수 민원 지속 발생(’17.6.10.조치완료)

바. 지장물 이설 지연으로 공정이 지연되고 있으니 공사 전 유관기관 협의 철저

사. 매헌지하차도 부진공정 만회대책 제출.(’17.6.10.까지 제출)

- 서울시 공사 구간 ’14.10. 착수일부터 추진경위, 공정부진 사유, 지연 공정 만회대책 보고

아. 작업자 이동 가설 보도육교 조속 설치.  끝.

주무관							김구			도시고속도로과장					05/31 명경출
협조자				주무관						장종환
시행			토목부-11191									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-8664						/전송			02-3708-2599					/	neuf@seoul.go.kr												/	대시민공개