투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년 관공선 중간검사 및 추가 수리 용역 시행(설계변경)

1. 수상안전과-2734(2017.5.30.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 「2017년 관공선 중간검사 및 수리 용역」진행중 노후로 인한 부식 및 파공이 발견되어 아래와 같이 설계변경하여 추가 수리를 시행 하고자 합니다.

- 아    래 -

****************************2017년 관공선 중간검사 및 추가 수리 용역(설계변경)

**************************시흥조선, 대표 이기설(☎031-318-3130)

**************************************************

*****************************************************************

*************************************************************** 추가 수리 필요

**********************************************************************************)

붙 임 : 1. 2017년 관공선 중간검사 및 수리 용역-추가 수리 및 지출 계획 1부

2. 변경 전·후 설계내역서 각 1부

3. 협의 전·후 견적서 각 1부.  끝.

주무관	최윤정		수상안전과장	박재민		운영부장	05/31 최규해
협조자	주무관	심옥경		총무과장	박병현
시행	수상안전과-2748	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25)	/
전화		/전송		/		/	부분공개(7)