투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	공사재개 예정 알림 및 보상절차 조속 마무리 요청

1. 도로계획과-6389(17.4.27), 토목부-10259(17.5.22)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 경원선철도 이설과 연계된“녹천마을 ~ 녹천지하차도간 도로개설 공사”를“동부간선도로확장공사(1공구)”에 포함 조기에 사업을 완료 될 수 있도록 요청한 사항에 대하여 도로개설 구간 내 사유지 보상 및 철도부지 보상절차 등의(3개월 소요) 선행 없이는 조기 공사 착수는 곤란(보상지연 등으로 인한 시공사 간접비 요구 등)하며 경원선 철도이설 완료 시기(9.30) 및 공사의 적정성 등을 고려하여 부득이 2017.9.1.(금) 공사를 재개하여 12.31일까지 도로개설 공사를 완료 할 예정임을 알려드리오니 업무에 참고하시기 바라오며,

3. 아울러 도로개설 구간 토지(사유지 및 철도부지) 보상절차가 조속히 이루어지면 공사 재개시기 등을 추가로 앞당길수 있음을 알려드리오니 토지 보상관련 업무 주관 부서인 노원구(토목과)에서는 사유지 보상완료 및 철도부지에 대하여 조속히 협의 하시어 그 결과를 제출하여 주시기 바라오며 보상절차에 대한 향후 추진계획을 6.10(금)한 제출하여 주시기바랍니다. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(도로계획과장),노원구청장(토목과장)
주무관	김동현		교량건설과장	박용택		토목부장	06/01 김영수
협조자	주무관	노순재
시행	토목부-11257	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 14	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2576	/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개