배급수관 정비공사 추진회의 결과 보고(2차)

결재	★주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	윤혜정	박종일	06/02 최명익

	우리과에서 시행중인 「제기동 1152-10~142-12외 4개소 배급수관 정비공사」와 관련하여 추진회의를 개최하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

일 시	2017년 6월 1일 (목) 15:00 ~ 16:00
장 소	3층 시설관리과
참 석 자	시설관리과장, 시설관리팀장, 시설9급 윤혜정 서울시설공단 공사감독 송원우 케이비알건설산업(주) 부장 정용우
회의내용	◯ 유관기관 병행공사구간(4,5구간) 세부 공사추진계획 관련 - 6.1일(목) 경찰서 굴착 승인 관련 자료 접수 완료하였으며, 약 3일의 경찰서 검토 후 최종 승인 예정 - 최종 승인 전까지 공사홍보문 배포 및 안내현수막 설치 준비 - 본공사 시행 전 작업준비 및 관련 절차 및 서류 준비 철저히 하여 굴착 가능 즉시 작업이 가능토록 하고 작업이 원활히 진행될 수 있도록 지원 ◯ 안전관리 철저 및 도로굴착 구간 내 다짐 철저
조치사항	◯ 케이비알건설산업 - 경찰서 최종 승인 전까지 공사홍보문 배포 및 안내현수막 설치 준비 - 장비 및 인력 등 작업준비 철저히 하여 본공사 가능 즉시 착공하여 신속하게 공정을 진행할 수 있도록 조치할 것 ◯ 서울시설공단 - 본공사 시행시 일일감독일지 작성하여 제출할 것 - 안전관리 및 사급자재 관리 철저 - 도로굴착 구간 내 다짐 철저로 도로침하 발생하지 않도록 공사감독 ◯ 사업소 - 관급자재가 적기에 투입될 수 있도록 사전 준비 철저 - 유관기관 병행공사 일정 파악하여 협의할 것