문서번호	노동정책담당관-5652
결재일자	2017.6.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	노동정책팀장	노동정책담당관
정유진	허준	김동완	06/02 강석

『노동복합시설 조성 건물 리모델링』

설계용역 시행 계획(안)

2017. 06.

일자리노동정책관

(노동정책담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

노동복합시설 조성 리모델링 설계용역 시행계획(안)

노동복합시설 조성 리모델링 사업을 위한 설계용역을 아래와 같이 추진하여 사업을 조속한 시일 내 완료코자 함.

1		사업개요

○ 위    치 : 종로구 관수동 152-1번지

○ 규    모 : 지상5층/1동, 연면적 2,062.24㎡

○ 용    도 : 업무시설

○ 세부용도

층 별	용 도
1 층	이동노동자 쉼터, 주차장, 기계실 등
2 층	전태일 기념 공간 및 노동운동사 기획 전시관
3 층	교육장, 시민편의공간, 사무공간
4 층	노동 스페이스, 비정규직근로자 건강증진센터
5층~옥탑	노동권익센터, 감정노동권리보호센터, 비정규여성근로자센터

○ 사업기간 : ’16.9~’18.3월

○ 총사업비 : 19,077백만원(’17년 예산 18,063백만원)

○ 위치도 및 현황사진

위 치 도	현황사진

2		추진경위

○ 노동복합시설 조성 건물매입 및 리모델링 방침 수립	: ’16.09.
○ 투자심사 및 공유재산 심의	: ’16.10.
○ 시의회 예산 의결 및 공유재산 관리계획 승인	: ’16.12.
○ 정밀안전진단(평가등급 : c등급)	: ’17.02.~03.
○ 건물 매입	: ’17.03.~05.
○ 기술용역 타당성 심의(기술심사담당관)	: ’17.05.
○ 설계공모 실시(당선작 : *************)	: ’17.02.~03.

3		설계용역 시행계획

○ 용 역 명 : 노동복합시설 조성 건물 리모델링 설계용역

○ 용역금액 : 90,050천원

○ 용역기간 : 착수일로부터 60일

○ 추진근거

- 건축서비스산업 진흥법 제21조 및 지방계약법 시행령 제42조의4

- 건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2014-345호, 2014.6.12.)

- 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 제7장 설계공모(행정자치부 예규 제69호, 2016.11.23.)

- 서울특별시 공공건축물 설계발주 기준(도시공간개선단, 2015.4.15.)

○ 추진방법 : 지명공모 당선작과 수의계약

※ 지명공모 당선작

구 분	성 명(소속)	비 고
당선작	********** *******************

○ 계약상대자 : *****

※ 당선작 건축가가 개인으로 공동응모업체인 *****과 계약 체결 추진

○ 과업 범위

- 건축, 구조, 토목, 조경, 기계, 소방, 전기, 통신 분야에 대한 실시설계(기본포함)

- 필요시 각종 심의 및 관계법령에 의한 단계별 행정절차 이행

- 각종 인증(녹색건축, 에너지효율, BF 등) 관련 설계 및 인증 취득

- 기타 본 과업의 수행을 위하여 발주기관에서 요구하는 업무

4		향후 계획

○ 과업내용 조정·협의 및 계약 의뢰(재무과)	: ’17.6월 1주
○ 설계용역 추진	: ’17.6.~8월
○ 공사 의뢰(도시기반시설본부)	: ’17.9월
○ 공사추진 및 준공	: ’17.10~’18.3월

붙임  1. 설계용역비 산출 내역서 1부.

2. 과업내용서 1부.  끝.