문서번호	조경과-2984
결재일자	2017.6.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	조경과장
호명옥	강금완	06/05 강인호
협 조

「서울대공원 쉼터(피크닉존) 조성공사」

실정사항 검토보고

2017. 6.

조  경  과

「서울대공원 쉼터(피크닉존) 조성공사」

실정사항 검토보고

「서울대공원 쉼터(피크닉존) 조성공사」추진과 관련 실정사항에 대하여 검토하고 아래와 같이 조치하고자 함
		ㅊ
	ㅊ

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울대공원 쉼터(피크닉존) 조성공사

○ 공사기간 : 2017. 5. 15. ~ 6. 13.

○ 공 사 액 : 금183,994,982원

- 도급비 : 128,279,982원 / 관급자재비 : 55,715,000원

○ 도 급 자 : ㈜ 아이소파플레이  정태연

□ 실정검토 사항

현황및문제점	검토의견	비고
○ 쉼터 주변 동물사의 의견 반영 및 현장여건 변경 등을 고려하여 데크(A,B,C) 변경에 따른 세부 사항 조정 필요	○ 단차 등 조정에 따른 면적, 측면마감, 난간 물량 조정 ○ 데크를 경사면을 낮춤에 따라 기존 수목을 활용한 앉음벽을 추가 설치 ○ 데크기반조성을 위하여 토공 및 주변 정비작업 등	데크A(동양관 앞) 데크B(남미관삼거리) 데크C(유인원관 앞)
○ 동양관앞(데크A) 자연배수 되던 우수 처리 ○ 남미관삼거리에 있던 평의자가 노후로 이용불가	○ 데크 하부에 우수관으로 연결 조치 ○ 철거 및 처리 조치

□ 처리계획

○ 위 검토내용과 같이 공사여건이 변경되었기에 본 사업의 시급성을 감안 우선 시공토록 하고, 추후 설계변경 처리하고자 함

- 데크 단차 조정으로 변경될 안전난간은 감으로 변경

(하드우드 난간 : 48경간 → 30경간).  끝.