문서번호	정보통신보안담당관-11020
결재일자	2017.6.5.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		통신망관리팀장	정보통신보안담당관
임시홍		이명원	06/05 代이방우
협조

정보통신장비(Access SW) 교체계획

2017. 6

정보통신보안담당관

정보통신장비(Access SW) 교체계획

정보통신장비(Access SW) 구매계약이 완료되어 신청사,

서소문청사 등에 운영 중인 액세스 스위치를 교체하고자 함

Ⅰ				추 진 근 거

□ 정보통신장비(Access SW) 구매계획(정보통신보안담당관-4599/`17.3.3)

□ 정보통신장비(Access SW) 구매 계약체결(재무과-23985/`17.5.11)

Ⅱ				사 업 개 요

□ 규    모 : 액세스 스위치 50대(24 Port 41대, 48 Port 9대)

□ 구    성

□ 계약금액 : 138,012,600원    ※ 계약업체 : 주식회사 스마트컴

□ 사업기간 : `17. 5.10 ~ 6.19

Ⅲ				추 진 경 과

□ 사업자 선정 및 계약               : ‘17. 4. 21 ~ 5. 10

□ 사업수핵계획서 작성 및 착수보고회 : ‘17. 5. 11 ~ 5. 23

□ 장비 입고 및 검수                 : ‘17. 5. 30 ~ 5. 31

□ 현장 점검 및 설치환경 조사        : ‘17. 5. 24 ~ 6. 5

Ⅳ				교 체 계 획
					-

□ 일    자 : 2017. 5. 11 ~ 6. 9

□ 장    소 : 신청사, 서소문청사, 무교청사 등 4청사 22개 통신실

□ 교체내역 : 붙임 참조

○ 신청사 4대, 서소문청사 34대, 무교청사 1대, 남산별관 11대

□ 작업방안

○ 원활한 행정업무 수행을 위해 휴일, 가정의 날 야간 작업 실시

○ 장비교체 후 5분 이내 네트워크 정상화 안될 시 비정상 설치로 판단, 기존 장비로 원상복구 조치

□ 작 업 자 : 8명

○ 정보통신보안담당관(1) : 임시홍 주무관

○ 유지보수업체(2) : 엠티데이타 박웅일, 이원문

○ 설치업체(5)

- 사업총괄 : 스마트컴 장은배, 유석호

- 장비설치 : 메트로컴넷 홍태영, 홍종석, 한동석

구 분	일 자	작업 내역
사전작업	5. 11 ~ 6. 5	○ 액세스 스위치 설치환경 확인 - 설치환경 조사(통신실 Rack, Uplink Type 등) ○ 장애 대비용 Uplink Cable 예비용 준비 ○ 교체장비 입고 및 검수 ○ Config 설정 및 스위치 상태 최종점검
장비설치	6. 6 ~ 6. 9	○ 사용자 랜케이블 분리, 기존 액세스 스위치 Rack에서 분리 - 분리한 액세스 스위치를 장애 복구를 위하여 Rack 상단에 비치 ○ 신규 액세스 스위치 설치, 전원케이블 연결 ○ 사용자 랜케이블 연결, Uplink 케이블 연결 ○ 액세스 스위치 LED상태 확인, Uplink 상태 확인 ○ IPT 전화기 통화연결 확인, 행정포털 접속 확인
동작확인/ 모니터링	6. 10 ~ 6. 12	○ 액세스 스위치 상태 모니터링 - CPU, Memory, Process, 트래픽 상태 등 ○ 상단 스위치와 연동정보 확인 ○ 액세스 스위치 Log 확인
단위· 통합 시험/ 운영 교육	6. 13 ~ 6. 16	○ 단위·통합 시험 계획 수립(일정, 대상, 범위 등) ○ 장비별 네트워크망 연동시험 및 최종시험 - Inferface 정보, 전원, 냉각팬 상태, 구성 정보, 네트워크 통신확인 ○ 운영자 및 사용자 교육 계획 수립 및 실시
준공검사	6. 19	○ 사업 완료보고회 실시 및 서류 제출 - 사업완료 보고서, 물품별 정품 확인서 및 매뉴얼 - 단위·통합 시험 결과보고서, 설치 전․중․후 사진첩 등

□ 세부교체계획

□ 장애 백업복구 Flow

Ⅴ				행 정 사 항

□ 액세스 스위치 교체계획 공문 발송 및 시업무 게시판 공지

□ `17. 6. 7(수), 6. 9(금) 가정의 날 초과근무 인정

붙 임 : 교체장비 내역 1부.  끝.