문서번호	청소년담당관-10549
결재일자	2017.6.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	청소년상담팀장	청소년담당관
선지현	박노숙	06/05 이창석

「도봉청소년독서실」시설개선

건물 축소 공사 검토보고

2017. 6.

평생교육정책관

(청소년담당관)

「도봉청소년독서실」시설개선

건물 축소 공사 검토보고

도봉청소년독서실 시설개선사업과 관련하여 시설 안전 확보를 위한 건물 구조 보강 공사 등에 대해 검토 보고 드림

□ 사업개요

○ 사업명 : 도봉청소년독서실 구조보강 및 시설 개·보수

○ 대  상 : 구립도봉청소년독서실

구분	소재지	연면적 및 규모	등기일 (준공일)	재산관리관 (위임관리관)
건물	도봉구 마들로 605 (도봉구 방학동 713-13)	1,193.39㎡ (지하1층~지상3층)	’95.02.24. (’87.06.10.)	청소년담당관 (도봉구 교육지원과장)

○ 사업기간 : ’17. 4월 ~ 11월

○ 사업내용

- 3층 부분 증축 건축물 철거(약 75.9㎡)

- 구조체 보강

- 옥상방수, 외벽도색, LED 전등 교체 등

○ 소요예산: 200백만원

□ 검토사항

구분	공사 내용	자치구 의견	검토 의견
제1안	3층 존치	추가 구조 보강이 필요로 예산(2억원) 초과	공기 연장 및 추가 비용 발생, 안전 미확보로 부적정
제2안	3층 일부 철거 (수녀원 기숙사만 철거)	부분철거로 인해 건물 미관을 해치고 부분 마감에 건축비용 추가 소요	건물 미관을 해치며 열람실 (30석)을 유지할 사유 없음 ※ 현재 364석으로 시설 규모 큼
제3안	3층 전체 철거 (물탱크실, 계단실 제외)	전체적인 건물 하중 감소로 구조보강 범위가 축소되어 공사비용 절감과 안전확보 가능, 건물 미관 유지에 용이	건물의 안전 확보와 전체적인 미관을 고려하여 3층 전체 (138.09㎡)철거 공사 적정

※ 도봉구청에서 세가지 안 제시

□ 검토결과 : 제3안으로 추진

○ ’87년 6월 준공된 도봉청소년독서실은 30년된 노후시설로 청소년 및 주민 이용 시 안전문제가 우려되는 바, 건물의 구조적 안전성과 내구성, 전체적인 외관 등을 고려

○ 현장점검 및 구청에서 제시하는 안을 종합적으로 검토한 결과 안전을 위한 최소한의 조치로 3층 건물 철거 후 구조보강(보호기둥 설치) 및 보수공사를 실시하는 것이 타당할 것으로 사료됨.

□ 향후일정

○ '17. 06. : 설계용역 준공

○ '17. 09. : 구조 보강 공사 착공

○ '17. 11. : 공사 준공

붙임 : 1. 현장사진 1부.

2. 현장점검표 1부.  끝.