상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	공사 변경 계약 체결 (영등포정수센터 친환경 녹색 정수장 조성사업 공사)

1. 생산관리과-6821(2017. 6. 2.)호 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 ‘영등포정수센터 친환경 녹색 정수장 조성사업 공사 계약’을 아래와 같이 변경하고자 합니다.

가. 계약건명 : 영등포정수센터 친환경 녹색 정수장 조성사업 공사  계약

나. 계약업체 : ㈜이그린종합건설

다. 계약금액 : 1,112,098,700원

라. 변경내용 : 계약금액 및 기간 변경

구 분	당초	변경	비 고
금액	1,112,098,700원	1,035,200,000원	감 76,898,700원
기간	2017.4.7.~6.5.	2017.4.7.~ 6.15.	증 10일

마. 변경 사유

- 현장여건 변경사항 반영 및 효육적 유지관리를 위한 시설물 추가 설치를 위하여 설계변경 시행

따로붙임 : 변경 계약 검토서 등 각 1부. 끝.

주무관	황한범		재무회계과장	박병식		요금관리부장	정진일		상수도사업본부부본부장	06/05 구아미
협조자
시행	재무회계과-7800	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1243	/전송	02-3146-1209	/	h2sb@seoul.go.kr	/	부분공개(5)