문서번호	방재시설부-9625
결재일자	2017.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	방재시설부장
박계현		장수철	06/05 남궁용
협 조
	주무관			김소연

「양평1유수지 CSOs저류조 설치공사」

가시설 손율변경 실정보고 검토 보고

2017.05.

도시기반시설본부

방재시설부

「양평1 유수지 CSOs 저류조 설치공사」

가시설 손율변경 실정보고 검토 보고

『양평1유수지 CSOs저류조 설치공사』가시설(Sheet Pile) 손율변경에 대한 실정보고 검토보고임.

[관련공문 : 양평1유건 제2017-127호(2017.5.24.)]

1		공사개요

❍ 규    모 : CSOs저류조 Q=46,000㎥, 건축, 조경공사 1식

❍ 공사기간 : 2016.12.05.~2019.08.04.(전체)

2016.12.05.~2017.11.30.(1차)

❍ 도 급 비 : 총괄 14,537백만원(1차 8,061백만원)

❍ 시 공 사 : 대우산업개발(주) 외 2개사

❍ 건설사업관리단 : ㈜경동엔지니어링 외 3개사

2		보고내용

❍ 쉬트파일 사용기간 검토

- 쉬트파일 사용기간이 12개월 미만 으로 내역에 반영되어 있으나, 사용기간에

휴지일수, 강우기, 혹한기 기간이 누락되어 있어 이를 반영코자 함.

구분	설계서	착공계
예정공정표 가시설 사용기간	25개월(1차,2차 포함)적용	1차 : 15개월 적용 2차 : 11개월 적용
1차가시설 사용기간	12개월 미만 (휴지일수,강우기,혹한기 기간 제외)	최소사용기간 15개월 (휴지일수, 강우기, 혹한기 기간 포함)

❍ 쉬트파일 사용기간 연장에 따른 손율 변경

- 당초 : 12개월 미만, 손율 50%

- 변경 : 12개월 이상, 손율 70%

► 설계사 검토 의견  (동명기술공단 동기공 2017-1405호 관련)

내역서 적용시 Sheet Pile 강재 사용기간을 12개월 미만으로 적용 반영하였나

실 시공계획에 따라 Sheet Pile 강재 사용기간을 적용함은 타당.

❍ 공사비 검토                                             (단위 :  원)

구분	당 초	변 경	증 감	비 고
가시설공
1) Sheet Pile 공
SHEET PILE 사용료 12개월미만, 손율 50%	474,818,516		감) 474,818,516
SHEET PILE 사용료 12개월미만, 손율 70%		693,147,955	증) 693,147,955
직접공사비	474,818,516	693,147,955	증) 218,329,439
제경비	85,181,484	124,852,045	증) 39,670,561
공급가액	560,000,000	818,000,000	증) 258,000,000
부가가치세	56,000,000	81,800,000	증) 25,800,000
총공사비	616,000,000	899,800,000	증) 283,800,000

- 단가 검토 : 기존설계 자재단가 × 손율 70% × 낙찰율 81.135% 적용

4		건설사업관리기술단 검토의견

❍ 당초 설계서상 1차 가시설(SHEET PILE) 사용기간에 휴지일수, 강우기,

혹한기  기간은 산정하지 않았으므로

❍ 공사계약 일반조건 제19조의 2(설계서의 불분명·누락·오류 및 설계서간의

상호모순 등에 의한 설계변경)에 의거, 쉬트파일 사용기간 변경 및 손율변경

(12개월 이상)은 타당한 것으로 판단되며,

❍ 증·감되는 공사비는 향후 설계변경 시 공사계약일반조건 제6절 공사 설계의

변경, 제7절 계약금액의 조정에 의거 조치할 계획임.

5		보고자 의견

❍ 강재의 사용기간 및 손율은 예정공정표 상 공기를 기준으로 하고 있으므로

가시설(SHEET PILE) 사용기간 및 손율(12개월이상) 변경에 대한

건설사업관리기술단의 검토의견이 타당하여 실정보고 승인통보하여 차후

설계변경 시 반영토록 조치코자 함.

붙 임 : 건설사업관리기술단 공문 1부.  끝.