문서번호	방재시설부-9730
결재일자	2017.6.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		조경시설과장	방재시설부장
김달용		신용우	06/07 남궁용
협 조
	주무관			오열상

『월드컵대교 건설공사』

남단접속교 MP15 지장수목 처리 실정보고 검토보고

2017. 6.

도시기반시설본부

(방재시설부)

『월드컵대교 건설공사』

남단접속교 MP15 지장수목 처리 실정보고 검토보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

『월드컵대교 건설공사』책임건설사업관리기술자로 부터 남단접속교

MP15 교각구조물 설치에 저촉되는 지장수목 처리에 대한 실정보고

사항이 있어 검토하여 보고 드림.

▸관련공문 : 월드컵(감리)2017-276호(2017.05.30)

Ⅰ		공사개요

○ 위    치 : 마포구 상암동 ~ 영등포구 양평동

○ 규    모 : 폭 31.4m(왕복 6차로), 연장 1.98㎞

▸조경공사 : 수목이식 5,682주, 제거 13,300주, IC조경 2개소 등

○ 기    간 : 2010.3.22 ~ 2020.8.31

○ 총공사비 : 2,589억원 (조경 33억원)

Ⅱ		실정보고

○ 지장수목 처리계획 승인 요청

▸남단접속교 MP15 구간 말뚝타설 및 교각 구조물 설치 저촉

▪지장수목 현황

□영등포정수센터 : 교목 43주, 관목 401주

□서울시설공단   : 교목 26주, 관목 600주

▸관련기관 협의 결과

▪교목(이식 15주, 제거 54주), 관목(제거 1,001주, 신식 600주)

□영등포정수센터 : 교목(이식 9주, 제거 34주), 관목(제거 401주)

□서울시설공단   : 교목(이식 6주, 제거 20주)

관목(제거 600주, 신식 600주)

Ⅲ		검토결과

○ 지장수목 발생사유 및 이식협의

▸영등포정수장 다목적관리동과 북측의 올림픽대로 사이의 완충녹지대에

식재된 수목이 남단접속교 MP15 구조물 공사에 저촉되는 사항으로

▸관리기관인 영등포정수센터 및 서울시설공단과 이식협의 완료 함

- 교목은 수형이 수려하고 이식시 확착이 양호한 수목에 대하여 이식

- 관목은 이식시 수형 불량으로 전량 제거하되, 올림픽대로변은 관목 600주를

대체식재 함

○ 소요예산                                          (단위 : 천원)

구 분	단위	당 초		변 경		증 감
		수량	금 액	수량	금 액
계		-	-		17,230	17,230
교목이식	주	-	-	15	6,143	6,143
교목․관목제거	주	-	-	1,055	4,671	4,671
관목식재	주	-	-	600	3,993	3,993
임목폐기물	Ton	-	-	18.5	857	857
부 가 세					1,566	1,566

Ⅳ		보고자 의견

○ 조경공사 설계변경에 대한 책임건설사업관리기술자의 의견이 타당

하다고 판단되며, 설계변경 시 반영하도록 승인하되, 설계변경 신규

단가 적용은 강제협의율(82.004%)로 적용하고 단순 물량증감은

기 계약된 단가를 반영하고자 함

붙임 : 1. 위치도 및 현황사진 1부.

2. 책임건설사업관리기술자 검토의견서 1부.  끝.

위치도 및 현황사진

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

지장수목 위치도

지장수목 현황사진