문서번호	조경과-3116
결재일자	2017.6.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	주무관		조경과장		관리부장
호명옥	강금완		강인호		06/12 김명용
협 조

「서울대공원 쉼터(피크닉존) 조성공사」

설계변경 시행 계획

2017. 6.

조 경 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「서울대공원 쉼터(피크닉존) 조성공사」

설계변경 시행 계획

『서울대공원 쉼터(피크닉존) 조성공사』와 관련 현장여건 및 동물사 의견을 반영하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 함
		ㅊ
	ㅊ

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 서울대공원 쉼터(피크닉존) 조성공사

○ 공사기간 : 2017. 5. 15. ~ 6. 13.

○ 공사내용 : 쉼터(휴게데크) 조성 3개소

○ 도 급 비 : 128,278,982원(관급자재 49,742,130원 별도)

○ 도 급 자 : ㈜아이소파플레이 정태연

Ⅱ		변경 사유

○ 공사 실정검토보고 : 조경과-2984(2017. 6. 5.)

○ 주요 변경내용(현장여건 변경 및 실측에 따른 경사도 조정 등)

- 시설물 물량조정(데크, 측면마감, 안전난간 등)

- 쉼터 주변 경관개선(수목식재 등)

- 남미관(데크C) 노후 평의자 철거 등

- 기존 수목을 활용한 공간활용(앉음벽 조정 등)

- 기반 조성을 위한 토공, 주변 정비작업(조경석쌓기 등)

- 동양관(데크A) 건물앞 우수 처리(데크 하부 우수관 설치 반영)

○ 변경물량 및 내역 : 붙임

Ⅲ		설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		금 액		증·감
		당 초	변 경
총공사비		183,994,983	183,994,000	(983)
도급액	공급가액	116,618,166	122,046,364	5,428,198
	부가가치세	11,661,817	12,204,636	542,819
	계	128,279,983	134,251,000	5,971,017
관급자재비		55,715,000	49,743,000	(5,972,000)

- 예산과목 : 공원이용시민만족도향상, 산림내이용시설및조경관리강화, 꽃동산조성및녹지조경시설물유지관리, 시설비및부대비, 시설비

Ⅳ		조치계획

○ 위 보고한 내용으로 설계변경 및 공사기간 연장 시행

- 당  초 : 2017. 5. 15. ~ 6. 13.(30일)

- 변  경 : 2017. 5. 15. ~ 6. 30.(45일)

붙임  1. 세부 변경내용 1부.

2. 변경내역서 1부.  끝.