상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	「도시계획정보시스템 고도화를 위한 정보전략계획(ISP) 수립 용역」5월 월간보고

「도시계획정보시스템 고도화를 위한 정보전략계획(ISP) 수립 용역」관련 2017년 5월 월간 수행내역을 아래와 같이 보고합니다.

- 아    래 -

❍ 공정율(전체대비) : 실적 13.4% (계획 13%, 달성율 103%)

❍ 주요내용

- 착수보고(5.22) - 시 및 자치구 관련업무 담당자, 용역사 직원 등 20명 참석

- 인터뷰 대상 선정(1차-자치구, 2차-서울시), 방문 일정 및 설문지 작성

- 관련 지침 및 법령, UPIS 인프라 및 정보기술동향 등 분석

- UPIS 고도화 추진방향 정립을 위한 관련자료 검토 및 기능조사 등

	< 용역 개요 >
□ 과업내용 : 도시계획정보시스템 고도화 / 자료입력체계 개선 방안 마련 □ 계약업체 : 피앤티컨설팅(주)외 1개사 컨소시엄 □ 기간/사업비 : `17.5.16∼`17.11.11(6개월) / 158백만원

❍ 향후일정

- ‘17. 6.13~16(1차) : 자치구 방문 설문조사(도봉, 영등포 등 6개 자치구)

- ‘17. 6.19~21(2차) : 서울시 방문 설문조사(도시관리과,공간정보담당관 등 4개부서)

※ 도시계획국장, 도시계획과장 및 상임기획단장 인터뷰 일정은 별도 추진

- ‘17. 6월 : 타 광역시도 벤치마킹 수행(부산광역시 등)

붙임 1. 월간보고(5월) 1부.

2. 주간보고(1차-3주) 1부.

3. 공정표(5월) 1부.

4. 인터뷰 일정 및 설문지(의사결정자/서울시/자치구)

5. 기타(회의록,자료제공 관리대장) 1부.  끝.

주무관	류희영		도시계획정보팀장	이석우		도시계획과장	06/12 최진석
협조자
시행	도시계획과-8710	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2133-8339	/전송	2133-0736	/	hyyoo@seoul.go.kr	/	대시민공개