	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	책임감리용역 변경계약 의뢰(천호대로 확장공사, 전체10회, 5차4회)

우리본부에서 시행중인 『천호대로(광나루역) 확장공사 외 1개소 전면책임감리용역』의 설계변경(전체10회, 5차4회)에 따른 변경계약을 다음과 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 천호대로(광나루역) 확장공사 외 1개소 전면책임감리용역

3. 용역기간 : '10.11.01 ~ '18.01.31 (5차 : '15. 4. 1 ∼ '17.06.30)

4. 도 급 비 : 4,975,000천원 (5차 : 1,843,800천원)

5. 도 급 자 : 주)수성엔지니어링

6. 예산과목 :

o 교통사업특별회계, 도시교통본부 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 버스서비스이용제고, 천호대로 중앙버스전용차로 확충, 감리비

7. 설계변경 내역

【단위 : 천원】

구 분	계 약 금 액			공 사 기 간		비고
	당 초	변 경	증·감	당 초	변 경
전체	4,975,000	5,007,500	증)32,500	‘10.11.01. ~’18.01.31.	변경없음
5차	1,843,000	1,843,800	변경없음	‘15.04.01 ~‘17.06.30.	‘15.04.01 ~‘17.06.23.

붙  임  1. 설계변경 시행 방침 1부.

2. 설계변경 내역서 2부(전체 및 5차).

3. 합의각서 2부(전체 및 5차).  끝.

	토목부장
주무관	권순환		교량건설과장	박용택		토목부장	전결 06/14 김영수
협조자	경리과장	최정수
시행	토목부-12200	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96) 프리미어플레이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2577	/전송	3708-2599	/	ksh1216@seoul.go.kr	/	부분공개(5)