상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	계약변경 의뢰(사당역 일대 배수개선대책 기본설계)

1. 우리과에서 시행중인 「사당역 일대 배수개선대책 기본설계」에 대하여 용역기간을 아래와 같이 변경코자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

○ 용 역 명 : 사당역 일대 배수개선대책 기본설계 용역

○ 계약업체 : 동부엔지니어링 외4개사

○ 과업내용 :

- 사당역일대 내수배제 개선대책 종합검토를 통한 최적안 산정

- 단기대책(저류조 및 관거개선 등) 중 저류조 실시설계

나. 변경내용

구 분	당 초	변 경	비 고
총용역비 (천원)	*********	*********	변경없음
과업기간	*******************	******************

○ 변경사유

- 희망어린이공원 빗물저류조 국민안전처 사전설계심의 이행

- 까치어린이공원 빗물저류조 대안검토

- 관련사업(도로터널 등)과의 연계성 검토

※ 예산과목 : 치수 및 하천관리, 수방대책 사업, 동작구 사당역 일대 배수개선

붙 임 : 1. 방침서 1부.

2. 합의각서 1부. 끝.

	하천관리과장
주무관	윤희성		청계천관리팀장	민형일		하천관리과장	06/14 손경철
협조자
시행	하천관리과-9613	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)