문서번호	교량안전과-10743
결재일자	2017.6.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
백운경		유제천	06/15 신응수
협 조
	기술점검팀장			박영권
	강구조교량팀장			정회평
	특수교량팀장			이윤성

「한강교량 보수․보강 공사」

주간공정회의 시행계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 6

교량안전과

「한강교량 보수․보강 공사」

주간공정회의 시행계획 보고

「한강교량 보수․보강공사」건설사업관리용역과 관련하여 대상공사 대분분이 계약 및 착수됨에 따라 원활한 공사관리를 위하여 주간공정회의를 시행하고자 함.

Ⅰ		사업현황

□ 한강교량 보수보강공사 건설사업관리용역

○ 기  간 : ‘17.1.5 ~ ’19.12.31(1차;‘17.1.5~12.31)

○ 사업비 : 2,440백만원(1차;1,000백만원)

○ 대표계약사 : ㈜ 동성엔지니어링

□ 대상공사 현황

연번	공사명	시공사	도급비(천원)	공사기간	비고
1	한강교량 일상유지보수공사(1공구)	(주)풍산씨앤씨	2,672,035	1.13~12.31	공사중
2	한강교량 일상유지보수공사(2공구)	(주)선진기술공사	2,661,671	1.09~12.31	“
3	동작대교보수공사(3차)	(주)케이에스씨건설	4,081,447	2.15~12.31	“
4	한강교량하상잔재물처리용역(1공구)	(주)합동종합건설	415,863	4.19~09.15
5	한강교량보도부노후목재데크보수공사	경인건설(주)	412,642	5.11~09.07	“
6	한남대교보수공사	유등건설(주)	445,062	5.11~11.06	“
7	한강대교보수공사	이지건설(주)	430,807	5.11~11.06	“
8	동호대교보수공사	진원피앤씨(주)	824,035	6.02~11.28	“
9	성수대교보수공사	(주)에스지공영	740,075	6.02~11.28	“
10	PSC교량 안전강화공사(서강대교)	고황건설(주)	1,232,553	5.31~11.26	“
11	PSC교량 안전강화공사(원효대교)	(주)성익건설	1,400,063	6.05~12.01	“
12	PSC교량 안전강화공사(올림픽대교)	-	1,408,576	-	적격심사중
13	한강대교 외 4 우물통보수공사	-	6,389,882	-	적격심사중

Ⅱ		주간공정회의 시행 계획

□ 일    시 : 매주 목요일 10:00 ~

□ 장    소 : 서소문별관 1동 2층 교량안전과 회의실

□ 참석대상 : 각 공사 담당자, 책임건설사업관리기술자(특별한

현안사항 발생시는 담당건설사업관리기술자 및 담당                현장대리인 참석)

□ 회의내용 : 주간 공사 추진현황 및 계획, 기타 현안 사항

Ⅲ		세부 공정회의 착안사항

□ 부실공사 방지대책 토의

□ 품질 및 안전관리사항 이행상태 확인 점검

□ 공사추진 계획 및 실적분석

□ 공사추진 저해요인 분석

- 부진공사 만회대책 등 검토

□ 지시사항 이행상태 확인,점검

□ 기타 문제점 및 애로사항,건의사항

붙임 : 1. 한강교량 보수․보강공사 추진현황 1 부. 끝.