투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	계약 기간 변경 의뢰(2017년 상반기 관공선 검사 및 수리 용역)

1. 수상안전과-1412(2017. 3.20.)호와 관련입니다.

2. 관공선(서울711호, 713호, 714호, 716호)의 추가 수리중 선저 바닥(K-판)에 부식으로 인한 파공 및 균열이 심하여 추가 절단 작업 등을 실시하고자 계약 변경을 아래와 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약현황

용 역 명	2017년 상반기 관공선 검사 및 수리 용역
계약상대자	***************
계 약 금 액	***********************************
착 수 일 자	2017. 4. 25.
용 역 기 간	2017. 4. 25. ~ 2017. 6. 19.

나. 변경내역 : 용역기간 변경

변 경 내 역	변 경 전	변 경 후
용 역 기 간	2017. 4. 25. ~ 2017. 6. 19.	2017. 4. 25. ~ 2017. 6. 30.

다. 변경사유 : 추가 수리중 선저 바닥(K-판)에 부식으로 인한 파공 및 균열이 심하여 추가 절단 작업 및 킬쿨링 박스 제작 설치 실시.

붙  임 : 1. 준공기한 재연기 검토보고 1부.

2. 수리기간 연장 요청서(시흥조선), 준공기한 연기의뢰서 각 1부.  끝.

	수상안전과장
주무관	최윤정		수상안전과장	06/15 박재민
협조자
시행	수상안전과-2982	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25)	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)