국회의원 요구 자료 제출

시 행	서북권사업과-5034	(		)
접 수		(		)
결재일자	2017.6.16.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	기획담당관,동남권사업단장

주무관	개발관리팀장	서북권사업과장	지역발전본부장		결재
김성만	박해일	차창훈	06/16 정수용
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호443번, 설 훈의원, 외교통일위원회)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

설 훈의원(외교통일위원회, 더불어민주당)

□ 요구번호 : 443번

□ 요구목록 :

최근 3년간 1억원 이상 사업 중 기준계획(설계) 변경된 사업현황

- 당초 사업예산/ 입찰방식/ 입찰결정 금액/ 변경 후 예산

- 사업별 변경사유/ 심의위원회 심의 안건 및 결정내용

- 해당 기관장이 요청하는 사업 및 1차 변경시 심의 대상이 아니었다가

이후 변경으로 증액공사비 합산금액이 심의대상인 사업 현황

□ 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성사업 기본 및 실시설계 용역

○ 당초 사업예산 : 923,000천원

○ 입찰 방식 : 1인 수의계약(현상설계공모 당선자)

○ 계약 금액 : 900,000천원

○ 변경 사업예산 : 1,143,012천원(증 243,012천원)

○ 변경 사유

차수	변경내용
1차 (’16. 5. 2.)	도시계획시설 (문화시설, 도로) 중복 결정에 따른 도서 작성 지하보도 계단을 평탄화하여 무장애 공간으로 조성
2차 (’16. 9. 7.)	세종대로 1개 차로 보행자 통로 점용에 대한 심의 도서 작성 건설기술심의 및 설계자문회의 검토 요청으로 지하층 전시실의 안전성 및 쾌적성을 위한 피난·환기 시뮬레이션 검토서 작성 공공건축물의 신재생 에너지 설치에 따른 지열이용 기술검토서 작성
3차 (’16.12.29.)	행정사무 감사시 시의회 요청에 따라 시의회 광장과의 연계성 확보를 위한 설계안 제시

○ 심의위원회 심의 안건 및 결정 내용 : 해당사항 없음

○ 변경으로 증액공사비 합산금액이 심의대상인 사업여부 : 해당없음

따로붙임 : 요구자료 서식 1부.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (서북권사업과)	담당사무관	박 해 일
	☎2133-1562	담당자	김 성 만
	작 성 일 : 2017. 6.