문서번호	관광정책과-7965
결재일자	2017.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	지역관광진흥팀장	관광정책과장
박진화	고경인	06/16 김재용

왕십리 여행자 거리 조성 사업

시비 보조금 지원 결과 및 정산 보고

2017. 6.

서 울 특 별 시

(관 광 정 책 과)

왕십리 여행자 거리 조성 사업

시비 보조금 지원 결과 및 정산 보고

여행객이 편안하게 머물 수 있는 환경을 마련하고자 왕십리 여행자거리 조성 사업을 지원하고, 추진성과 및 정산결과를 보고 드림

Ⅰ		사 업 개 요

□ 추진근거

○ 서울특별시 지방보조금 관리 조례 제4조

○ 서울특별시 관광진흥조례 제5조

○ 지역관광 활성화 지원사업 추진계획(관광정책과-2853, '16.3.4.)

○ 왕십리도선동 여행자거리 조성사업 시비 보조금 교부계획(관광정책과-6236, '16.5.16.)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2016. 3 ~ 12

○ 대상지역 : 성동구 왕십리도선동(모텔밀집지역 2개 구간)

- 1구간 : 왕십리로24나길 20(할리스커피숍) ~ 무학로2길 47(컬리넌 호텔)

- 2구간 : 왕십리로22길 22(힐모텔) ~ 무학로2길 43(리전트모텔)

○ 사업내용

- 고산자 김정호 모티브 여행자거리 조성 및 상징 조형물 등 설치

- 도로포장 등 도로정비를 통한 쾌적한 보행환경 제공

- 여행자거리 일대 일반음식점 다국어 메뉴판 제작 지원 등

○ 소요예산 : 300백만원(자치단체자본보조, 전액 시비)

Ⅱ		사업추진 결과

□ 추진성과

○ 여행자 거리의 역사와 정체성 확립을 위한 테마거리 조성

- 역사적으로 대동여지도 제작을 위한 김정호의 국토여행 및 도읍지를 찾는 무학대사의 여행 등과 관련이 있는 왕십리와 고산자로에 테마거리 조성

▸ 고산자 김정호 상징 조형물 및 관광명소 바닥판석 설치

▸ 아트월 3개소(호텔 컬리넌, 남도집, 힐 모텔), 다국어 관광안내표지판 및 글빛글 설치 등

김정호 상징조형물	아트월(남도집)
아트월(호텔 컬리넌)	아트월(힐모텔)
다국어 관광안내표지판	글빛글

○ 보행자의 안전과 쾌적한 보행 환경 제공을 위한 도로 환경 개선

- 아스팔트 포장 정비 600㎡, 미끄럼방지 도막포장 2,035㎡ 등

도막포장 공사 전	도막포장 공사 후
계단 공사 전	계단 공사 후

○ 여행자거리 일대 일반음식점 다국어 메뉴판 제작 지원

- 지원대상 : 제작을 희망하는 일반음식점 21개소

- 지원내용 : 핸드형(11개소) 및 게시대형(10개소) 다국어 메뉴판(한･중･일･영) 제작 지원

- 기대효과 : 외래 관광객 여행 편의 제공 및 영업주 서비스 향상

다국어 메뉴판(게시대형)	다국어 메뉴판(핸드형)

Ⅲ		보조금 정산

□ 사업비 집행 내역 및 집행잔액 발생사유

(단위 : 원, %)

구 분	당초예산	변경예산(A)	집행액(B)	집행률 (B/A)	집행잔액 (A-B)	발생사유
합 계	300,000,000	300,000,000	291,002,050	97.0%	8,997,950
왕십리도선동 여행자거리 조성 실시설계 용역	20,000,000	20,000,000	18,800,000	94.0%	1,200,000	계약심사
도로환경 개선	187,000,000	124,334,990	128,992,050	103.6%	△4,657,060
상징 조형물 등 설치	80,000,000	145,707,480	138,260,000	94.9%	7,447,480	계약심사
다국어 메뉴판 제작	5,000,000	5,000,000	4,950,000	99.0%	50,000	계약심사
기타(폐기물 이전비 등)	8,000,000	4,957,530	-	0.0%	4,957,530	집행사유 미발생

□ 사업비 변경사유

(단위 : 원)

구 분	당초예산(A)	변경예산(B)	증감액(B-A)	주요 변경사유
도로환경 개선	187,000,000	124,334,990	△62,665,010	보안등 개량 및 설치 사업 취소에 따라 상징 조형물 설치 예산으로 변경
상징 조형물 등 설치	80,000,000	145,707,480	65,707,480	아트월 1개소 추가 및 다국어 관광안내표지판 설치에 따른 사업비 증가
기타(폐기물 이전비 등)	8,000,000	4,957,530	△3,042,470	집행사유 미발생에 따라 상징조형물 설치 예산으로 변경

□ 정산내역 검토의견

○ 자치구에서 제출한 보조금 정산보고서 및 증빙자료 등을 검토한 결과, 집행내역과 증빙자료에 이상이 없으며, 교부목적 및 용도에 따라 적정하게 보조금을 집행하였음이 확인되어 정산 확정하고자 함

□ 향후일정

○ '17. 6.20. : 보조금 반납액에 대한 세외수입 부과 요청(관광정책과→세무과)

○ '17. 6.21. : 보조금 반납 안내(시→자치구)

붙임 : 사업추진실적 및 정산보고서 1부. 끝.