투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	석면 해체·제거공사 착공일 알림 및 공사기간 변경(체부동 생활문화센터 조성공사)

1. 건축부-8949(2017.05.25.)호 관련입니다.

2. 우리 부서에서 시행중인 『체부동 생활문화센터 조성공사 석면 해체·제거 공사』와 관련하여 공사기간을 아래와 같이 변경하고 착공일을 알려드리니 반영하여 주시기 바랍니다.

【 아   래 】

구분	당초	변경	비고
착공일	`17.06.13.	`17.07.13.	증 30일
공사기간	착공일로부터 20일	착공일로부터 30일	증 10일

	건축부장
주무관	박윤수		문화시설과장	최달수		건축부장	06/16 김진용
협조자
시행	건축부-10209	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02)3708-2659	/		/	부분공개(5)