보고서(급수공사 연기)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
최호림	이승완	06/19 장종욱
협 조

문서번호 :	급수운영과-13572

노원구 상수도공사 감독업무 수행(********** 급수공사) 중 아래와 같은 사항이 발생하여 보고합니다.

2017. 6. 19.

보고자 : 직  지방시설주사보   성명 : 최 호 림

제목 : 급수공사 연기 보고

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2016년 2차 노원구관내 급수공사(장기계속단가계약)

연번	주 소	수요가명	공사기간	지시번호	비 고
1	***************	***	2017.6.9.~2017.6.19.	신설-59

□ 연기요청사항

연번	주 소	수요가명	연기요청 사유	공사 연기기간	요청인
1	***************	***	현장외벽 대리석 공사 자재 와 휀스 미철거로 급수공사가 불가	2017.7.7.	***

□ 검토결과

○ 급수공사 시행 중 신축현장 외벽 대리석 공사자재(6.24 완료예정) 와 외벽휀스 미철거(6.29 철거예정)로 급수공사가 어려운 실정으로 수요가측으로부터 급수공사 연기요청이 접수되어 공사기간 내 급수공사가 불가하므로 부득이 아래와 같이 공사기간을 연기하고자 합니다.

연번	주 소	수요가명	당초 공사기간	변경 공사기간
1	***************	***	2017.6.9.~2017.6.19.	2017.6.9.~2017.7.7.

○ 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.