문서번호	방재시설부-10475
결재일자	2017.6.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		조경시설과장	방재시설부장
송석범		신용우	06/19 남궁용
협조
	교량건설과장		박용택

- 목동교 성능개선공사 -

녹지대 원상복구 반영 실정보고 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 목동교 성능개선공사 -

녹지대 원상복구 반영 실정보고 검토보고

『목동교 성능개선공사』시행중 영등포구 및 양천구 녹지대에 대하여   원상복구 협의사항을 공사에 반영한 실정보고 검토보고 임.

※ 관련근거 : “녹지대 원상복구 실정보고”/ 한국종합(목동교) 2017-129호(2017.06.02.)

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 목동교 성능개선공사

□ 사업기간 : 2015.08.06. ~ 2017.08.11.

□ 위    치 : 서울특별시 양천구 목동로 331(목동교)

□ 규    모 : 교량성능개선 : 폭 20m, 연장 240m

□ 공 사 비 : 13,721백만원(조경 42백만원)

□ 시 공 사 : 용일토건㈜

□ 감 리 사 : ㈜한국종합기술

Ⅱ		녹지대 원상복구 협의사항

□ 영등포구 협의사항

○ 소나무는 기존 소나무와 유사한 수형으로 복구.

○ 안양천 사면부분은 인접하여 기 조성된 수크령으로 복구.

○ 원활하고 빠른 활착 복구를 위해 매트 형태로 식재.

□ 양천구 협의사항

○ 기존 가로수 버즘나무 4주를 이팝나무(R12) 4주로 교체 식재.

○ 기존 녹지대 내 소나무(R20) 4주, 소나무(R25) 5주 및 자산홍

(H0.4×W0.4) 500주 및 회양목(H0.3×W0.3) 500주 식재 반영

○ 자전거도로 주변 미루나무(R10) 5주 및 조팝나무(H0.8×W0.4)            500주 식재.

○ 사면 식생매트 790㎡ 및 벌개미취(8cm) 1,000본 식재 시 호안블럭          상부에 방초 시트 및 슬라이드 방지턱 등 기반시설물 시공.

Ⅲ		감리단 실정내용 및 검토의견

□ 실정보고 내용

구 분	공 종	규 격	단위	수 량			비고
				당초	변경	증·감(▽)
영등포구	소나무식재	H5.0xW2.5xR20	주	-	*	*	적정함
	소나무식재	H5.5xW2.5xR25	주	-	*	*
	자산홍식재	H0.4xW0.4	주	-	***	***
	맥문동식재	7-8분얼	본	-	*****	*****
	느릅나무식재	H4.0xR15	주	-	*	*
	수크령 식생매트	340x500xT40	㎡	-	*****	*****
양천구	소나무식재	H5.0xW2.5xR20	주	-	*	*
	소나무식재	H5.5xW2.5xR25	주	-	*	*
	회양목식재	H0.3xW0.3	주	-	***	***
	자산홍식재	H0.4xW0.4	주	-	***	***
	이팝나무식재	H3.5xR12	주	-	*	*
	미류나무식재	R10	주	-	*	*
	조팝나무식재	H0.8xW0.4	주	-	***	***
	유용토운반	0.7BH+15D/T	㎥	-	*****	*****
	식재면고르기		㎡	-	***	***
	샤스타데이지식생매트	340x500xT40	㎡	-	***	***
	옥잠화 식생매트	340x500xT40	㎡	-	**	**
	꽃창포 식생매트	340x500xT40	㎡	-	***	***
	물억새 식생매트	340x500xT40	㎡	-	***	***

구 분	공 종	규 격	단위	수 량			비고
				당초	변경	증·감(▽)
양천구	유용토운반	0.7BH+15D/T	㎥	-	****	****	적정함
	녹지경계석 설치	150*150*1000	m		**	**
	벌개미취 식재	8cm	본	-	*****	*****
	슬라이드방지턱 설치	H250,부직포	m	-	*****	*****
	부직포깔기	5.0T	㎡	-	***	***
	화강석경계석A	200*300*1000	m	-	**	**
	화강석경계석B	200*300*1000	m	-	**	**
	녹지경계석설치	150*150*1000	m	-	**	**
	부직포고압유공관설치	D150	m	-	**	**
	배수관설치	D100	개소	-	*	*
	분기관설치		개소	-	*	*

□ 검토의견

○ 관련기관(영등포구, 양천구)의 협의사항을 반영한 녹지대 구간에             지장수목 원상복구 시행은 타당하다 판단됨.

○ 신규단의 산출은 ****************하였고, 우선 실정          보고, 추후 설계변경함이 타당할 것으로 판단됨.

Ⅳ		개략공사비 내역

(단위 : 천원)

공 종	단위	당 초	변 경	증·감(▽)	비 고
영등포구 구간	식	-	*******	*******
양천구 구간	식	-	******	******
제잡비	식	-	******	******
공급액	식	-	*******	*******
부가세	식	-	******	******
도급공사비	식	-	*******	*******

Ⅴ		검토결과

□ 영등포구 사업구간내 녹지대 복구는 소나무, 철쭉류(자산홍), 맥문동         으로 식재하고 사면부는 수크령매트로 식재하여 조기 활착되도록 원상         복구 하고자 함.

※근거 : 원상복구 협의 회신(푸른도시과-2775/2017.2.15.)

□ 양천구 사업구간내 가로수는 이팝나무로 교체하고 기존 녹지대        소나무, 자산홍, 회양목을 반영하여 식재토록 하며, 안양천 자전거        도로 주변에 미루나무, 조팝나무 식재하고 사면은 식생매트와 방초        시트 및 슬라이드 방지턱을 설치하여 원상복구 하고자 함.

※근거 : 원상복구 협의 회신(공원녹지과-3889/2017.3.3.)

□ 우선 시공토록 실정보고 사항을 승인처리 하며 추후 설계변경        소위원회 심의를 득한 후 설계변경에 반영할 수 있도록 건설사업        관리단에 통보하고자 함.

붙임 : 감리단 실정보고 공문 1부.  끝.